조경공사 내역서 작성기준

– 2013 표준품셈 적용을 기준으로 -

2013.  4.

(사) 한국조경학회

발 간 사

우리나라에 조경공사업이 도입된 1974년 부터 오늘에 이르기까지 약 40여년간 많은 발전과 변화가 있었으나, 공사예정가격의 산정기준인 조경공사 표준품셈의 경우 최초 제정되었던 틀에서 벗어나지 못하고 체계성이 부족한 채 과거의 기준에 의하여 관습적으로 사용되어 왔습니다.

조경공사비 산출기준은 1962년 ‘국토건설청’이 발족되고 조경과 관련된 [떼뜨기, 떼붙임]으로 시작되어 “조경공사 표준품셈의 합리화에 관한 연구(1989)” 등으로 1990년 품셈 제·개정후 지난해까지 사용하였던 인력시공 품셈의 기초가 되었습니다. 이후 시대적 흐름에 따라 “조경공사 적산기준 개선방안에 관한 기초연구(2006)” 등 조경공사 표준품셈의 제·개정을 위한 노력에도 불구하고 소기의 성과를 달성하지 못한 채 수차례 부분 개정만 이루어져 오늘에 이르게 되었습니다.

2013년 조경공사 표준품셈은 부분개정이 아닌 조경공사 표준품셈 체계의 개편으로 향후 조경공사 표준품셈이 조경설계기준, 조경공사 표준시방서 등의 체계와 유기적으로 연관될 수 있는 기틀이 마련되었음은 매우 고무적인 일이라 하겠으며, 2014년 시행되는 유지관리부문 개정 및 나아가 식재 관련 부분만이 아닌 조경과 관련된 외부공간의 내용이 반영되도록 노력해야 할 숙제도 남겨져 있습니다.

2013년 표준품셈 주요 개정내용은 “식재면 고르기”, “예초”, “조경유용석 쌓기 및 놓기”의 3개 항목이 신설되었으며 잔디, 초화류, 관목, 교목 등의 식재 공정과 식재후 준공까지 및 준공후 유지관리 공정으로 분리하여 품을 적용하도록 개정되었습니다. 이는 착공 부터 준공까지의 전과정이 ‘식재’로 통합되어 있던 기존 품셈에 반해, 시공현장의 세부공정에 따라 준공전 유지관리를 세분하여 적용하도록 개정되어 조경공사 표준품셈이 보다 체계화되었다 하겠습니다.

이에 “조경공사 내역서 작성기준”은 개정된 표준품셈의 취지와 내용을 발주자·설계자·시공자 모두에게 현실적이고 실질적인 기준을 제시하고자 기술능력과 현장 경험이 많은 전문가들의 의견을 적극 반영하여 집필하였으며, 본 기준의 적용에 개선을 요하는 사항이나 보완해야 할 사항에 대하여는 추후 계속 보완 발전시켜 나갈 것입니다.

‘2013년 표준품셈’의 개정 방향과 ‘조경공사 내역서 작성기준’의 작성 취지에 맞추어 조경공사 예정가격 산출 시 식재기반조성, 식재, 식재 후 유지관리, 준공 후 유지관리를 공사원가에 충분히 반영되도록 발주처와 설계, 감리 및 시공분야의 모든 조경인이 함께 노력해 주시길 바랍니다. 끝으로 본 기준의 작성에 헌신적으로 참여해 주신 집필진과 조경의 발전을 위해 노력하시는 분들의 노고에 진심으로 감사드립니다.

2013. 4.

(사)한국조경학회장  김  한  배

목        차

조경공사 내역서 작성기준

Ⅰ. 편제 개편내용   4

Ⅱ. 주요개정 내용   5

1. 신설항목    5

2. 주기사항 변경     5

Ⅲ. 2013적용 조경공사 표준품셈의 적용기준   7        1. “식재면 고르기” 반영기준     7

2. 식재 후 준공 시 까지 유지관리비 반영 기준   7

2-1  잔디, 초화류 식재

2-2  관목식재

2-3  상록교목

2-4  낙엽교목

Ⅳ. 조경공사 표준품셈 개정 전·후 비교표   9

￭ 부 록 : 내역서 및 일위대가표

- 엑셀파일

- EBS파일 및 EBS코드표

Ⅰ. 편제 개편내용

조경공사 내역서 작성기준

조경공사 내역서 작성기준

개 정 전	2013년 적용
4-1 떼붙임 및 초파류종	4-1 식재기반 조성
	4-1-1 식재면 고르기
4-1-1 떼붙임
	4-2 잔디 및 초화류
4-1-2 종자판 붙임공
	4-2-1 잔디붙임
4-1-3 초류종자 살포공
	4-2-2 초화류 및 초류종자
1.초류종자 살포
	1.초류종자 살포(기계살포)
2.거적덮기
	2.거적덮기
4-1-4 초류종자 파종공
	3.초화류 파종
	4.초화류 식재
4-2 뿌리돌림
	4-3 관목
4-3 굴취
	4-3-1 굴취
4-3-1 나무높이에 의한 굴취
	4-3-2 식재
4-3-2 흉고직경에 의한 굴취
	1.단식
4-3-3 근원직경에 의한 굴취
	2.군식
4-3-4 관목류 굴취
	4-4 교목
4-3-5 묘목류 굴취
	4-4-1 굴취
	1.뿌리돌림
4-4 식재
	2.나무높이에 의한 굴취
4-4-1 나무높이에 의한 식재
	3.근원(흉고)직경에 의한 굴취
4-4-2 흉고직경에 의한 식재
	4-4-2 식재
4-4-3 근원직경에 의한 식재
	1.나무높이에 의한 식재
4-4-4 관목류 굴취
	2.흉고(근원)직경에 의한 식재
1.단식
	4-5 유지관리
2.군식
	4-5-1 전정
	1.일반전정
4-4-5 묘목류 식재
	2.가로수 전정
4-4-6 초화류 식재 및 파종공
	4-5-2 수간보호
4-4-7 롤형 지피식물 식재
	4-5-3 관수
4-5 유지관리
	1.인력관수
4-5-1 전정
	2.살수차에 의한 관수
1.일반전정
	4-5-4 제초 및 풀깎기
2.가로수전정
	1.잔디깎기 및 제초
	2.예초
4-5-2 수간보호
	4-5-5 시비
4-5-3 관수
	1.교목시비
1.인력관수
	2.관목시비
2.살수차에 의한 관수
	3.잔디시비
4-5-4 제초 및 풀깎기
	4-5-6 약제 살포공
4-5-5 시비
	1.수목류 약제살포
1.교목시비
	2.잔디 약제살포
	4-6 조경구조물
2.관목시비
	4-6-1 조경석 쌓기 및 놓기
3.잔디시비
	1.정원석 쌓기 및 놓기
4-5-6 약제 살포공
	2.조경유용석 쌓기 및 놓기
1.수목류 약제살포
	4-7 비탈면 녹화
2.잔디 약제살포
	4-7-1 절토사면 녹화
4-6 정원석 쌓기 및 놓기
	1.부착망 설치
4-7 암절개면 보호식재공
	2.식생기반제 뿜어붙이기

Ⅱ. 주요 개정내용

1. 신설항목

• 4-1-1 식재면고르기

• 4-5-4 제초 및 풀깎기

2. 예초

• 4-6-1 조경석 쌓기 및 놓기

2. 조경 유용석 쌓기 및 놓기

2. 주기사항 변경 내용

• 4-2 잔디 및 초화류

4-2-1 잔디붙임

[주] ② 식재 후 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는

“4-5 유지관리”에 따라 별도 계상한다.

4-2-2 초화류 및 초류종자

4.초화류 식재

[주] ③ 식재 후 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는

“4-5 유지관리”에 따라 별도 계상한다.

• 4-3 관목

4-3-1 굴취

[주] ⑥ 녹화마대, 녹화끈을 사용하여 분을 보호할 경우

“4-4-1 2.나무높이에 의한 굴취”를 적용한다.

4-3-2 식재

1. 단식

[주] ③ 식재 후 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는

“4-5 유지관리”에 따라 별도 계상한다.

2. 군식

[주] ③ 식재 후 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는

“4-5 유지관리”에 따라 별도 계상한다.

․ 4-4 교목

4-4-2 식재

1. 나무높이에 의한 식재

[주] ③ 식재 후 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는

“4-5 유지관리”에 따라 별도 계상한다.

[주] ③ 식재 후 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는

“4-5 유지관리”에 따라 별도 계상한다.

• 4-6 조경구조물

4-6-1 조경석 쌓기 및 놓기

1. 정원석 쌓기 및 놓기

[주] ① 본 품은 수석, 자연석 또는 조경석을 단독 또는 무리로 설치하여 미관이 고려된 경관을 조성하는 경우에 적용한다.

Ⅲ. 2013적용 조경공사 표준품셈의 적용기준

1. “식재면 고르기” 의 적용기준

[근 거]  “조경공사표준시방서(2008)” ‘2-3 식재기반조성’

[적용기준]

① 식재지역 전체 면적을 식재면 고르기의 대상으로 계상한다.

② 식재완료 후 폭우 등 불가항력적인 원인에 의해 식재면이 훼손되어 이를 복구할 경우, 당품을 적용한다.

2. 식재 후 준공 시 까지 유지관리비의 적용기준

[근 거]  “조경공사표준시방서(2008)” ‘4-7 식재 후 관리’

[적용기준]

① 아래 표는 식재 후 준공까지의 기간이 3개월 이내, 식재적기에 식재공사를 시행하였을 경우를 기준으로 제시한 것으로, 식재 후 준공까지의 기간이 3개월을 초과할 경우 초과기간에 대하여 관수, 병충해 구제, 시비, 제초 및 깎기 등에 대한 시행횟수를 늘려 적용한다.

② 혹서기, 가뭄이 지속될 경우, 일일관수를 원칙으로 한다.

③ 하절기 및 동절기 등 부적기에 식재할 경우, 이에 따른 추가 비용은 별도 계상한다.

④ 교목, 관목의 전정과 초화류의 잎따기 등은 필요시 계상한다.

• 2-1  잔디, 초화류 식재

공 종	춘기식재	추기식재
관수	주2회	주1회
병충해 구제	3회	2회
시비	1회	1회
제초 및 깎기	2회	1회
월동보호	필요시	1회
멀칭 및 차광막 설치	1회	필요시

• 2-2  관목식재

공 종	춘기식재	추기식재
관수	주2회	주1회
병충해 구제	3회	2회
시비	1회	1회
월동보호	필요시	1회
멀칭 및 차광막 설치	1회	필요시

• 2-3  상록교목

공 종	춘기식재	추기식재
관수	주2회	주1회
병충해 구제	3회	2회
시비	1회	1회
수간보호	1회	1회
월동보호	필요시	1회
멀칭 및 차광막 설치	1회	필요시

• 2-4  낙엽교목

공 종	춘기식재	추기식재
관수	주2회	주1회
병충해 구제	3회	2회
시비	1회	1회
수간보호	1회	1회
월동보호	필요시	1회
멀칭 및 차광막 설치	1회	필요시

Ⅳ. 조경공사 표준품셈 개정 전·후 비교표

구 분

개 정 전

2013년 적용

비 고

보완

“신  설”

4-1 떼붙임 및 초류파종

4-1-1 떼붙임(재배잔디)

(100㎡당)

구 분	보통인부	단 위
줄 떼	4.0 ∼5.0	인
평 떼	5.0 ∼7.0

[주] ① 본 품은 재배잔디를 붙이는 품으로 재료소운반, 흙고르기, 홈파기, 밥주기, 관수 및 마무리를 포함한다.

② 떼값 및 운반은 별도 계상한다.

③ 줄떼는 10 ∼30cm 간격을 표준으로 한다.

④ 조경상 세공(묘지, 정원 및 공원, 경기장, 기념물 주변등)을 요하는 붙임에 있어서는 현장조건에 따라 그 품의 일부 또는 전부를 조경공으로 계상할 수 있다.

4-1 식재기반조성

4-1-1 식재면 고르기(신설)

(10㎡당)

구분	단위	수 량
조경공 보통인부	인인	0.01 0.08

[주] ① 본 품은 부토 및 면고르기가 완료된 상태에서 인력으로 잔돌제거 등 식재면을 정비하는 작업이다.

② 본 품은 식재면고르기가 필요한 공종에 별도 계상한다.

4-2 잔디 및 초화류

4-2-1 잔디붙임

(100㎡당)

구 분	조경공(인)	보통인부(인)
줄 떼	0.84	1.96
평 떼	0.99	2.31

[주] ① 본품은 재배잔디를 붙이는 품으로 재료소운반, 홈파기, 뗏밥주기, 물주기 및 마무리를 포함한다.

② 식재 후 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는

“4-5유지관리"에 따라 별도 계상한다.

③ 줄떼는 10∼30cm 간격을 표준으로 한다.

토목/건축

구 분

개 정 전

2013년 적용

비 고

보완

4-1 떼붙임 및 초류파종

4-1-3 초류종자 살포공

1. 초류종자 살포

(100㎡당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
종 자 비 료 피 복 제 침 식 방 지 안 정 제 색 소 종 자 살 포 기 펌 프 특 별 인 부 보 통 인 부	복합비료 화이버 또는 펄프류 합성접착제 마아카이드그린 2,500 ∼3,000ℓ 50㎜	kg 〃 〃 〃 〃 시간 〃 인 〃	2∼3 10 18 5∼15 0.2 0.37 0.32 0.07 0.07	재료할증 포함 〃 〃 〃

[주] ① 본 품은 소운반을 포함한 것이며, 트럭(4.5톤급)의 기계경비는 별도  계상한다.

② 살수양생 및 객토량이 필요할 때는 별도 계상한다.

③ 시공전의 비탈면 정리 및 청소품이 포함되어 있다.

2. 거적덮기

(100㎡당)

구 분	단 위	수 량	비 고
특 별 인 부 보 통 인 부	인인	0.15 0.23

[주] ① 본 품은 성토사면 또는 토공사면 등에 시공되는 초류종자 살포에 시공되는 거적덮기를 설치하는 것으로 소운반이 포함되어 있다.

② 재료량(거적, 고정핀, 착지핀, 매트고정판, 비닐끈 등)은 설계수량에 따른다.

4-2 잔디 및 초화류

4-2-2 초화류 및 초류종자

1. 초류종자 살포(기계살포)

(100㎡당)

구 분		규 격	단 위	수 량	비 고
자재	종자		kg	2∼3	재료할증포함
	비료	복합비료	kg	10	〃
	피복제	화이버/펄프류	kg	18	〃
	침식방지안정제	합성접착제	kg	5∼15	〃
	색소	착 색 제	kg	0.2
장비	종자살포기	2500 ∼3500ℓ	hr	0.24
	트럭	4.5ton	hr	0.24
	펌프	∮50mm	hr	0.24
인력	조 경 공		인	0.07
	보통인부		인	0.04

[주] ① 본 품은 트럭에 종자살포기가 장착되어 살포하는 것을 기준한 것이다.

② 본 품은 소운반 및 재료배합이 포함되어 있다.

③ 살수양생 및 객토가 필요한 때는 별도 계상한다.

2. 거적덮기

(100㎡당)

구 분	단 위	수 량
조 경 공 보 통 인 부	인인	0.20 0.07

[주] ① 본 품은 성토 또는 절토사면에 거적덮기를 설치하는 것으로 소운반이 포함되어 있다.

② 재료량(거적, 고정핀, 착지핀, 매트고정판, 비닐끈 등)은 설계수량에 따라 별도 계상한다.

토목/건축

구 분

개 정 전

2013년 적용

비 고

보완

4-1 떼붙임 및 초류파종

4-1-4 초류종자 파종공

“내 용 생 략”

4-4 식재(植栽)

4-4-6 초화류 식재 및 파종공

구분	조경공 1인당
식재	500주(양호)
	350주(보통)
	200주(불량)
파종	30㎡

[주] ① 본 품에는 식재와 파종시 경운작업, 정지작업 및 관수품이 포함되었다.

② 특수화단(花紋花壇, 리본화단, 舖石화단)은 20%까지 가산할 수 있다.

③ 초화류 식재품의 적용은 아래의 조건을 감안하여 적용한다.

㉮ 양호 : 작업장소가 넓고 평탄하며, 식재의 내용이 단순하여 작업속도가 충분히 기대되는 조건인 경우

㉯ 보통 : 작업장소나 작업조건이 보통으로 판단되는 경우

㉰ 불량 : 작업장소가 경사지로서 작업조건이 복잡한 경우, 도로변․하천변․절개지 등 안전사고의 위험이 있는 경우

4-2 잔디 및 초화류

4-2-2 초화류 및 초류종자

3. 초류종자 파종

“내 용 생 략”

4. 초화류 식재

(100주당)

구 분	단위	양호	보통	불량
조경공	인	0.10	0.15	0.24
보통인부	인	0.05	0.08	0.13

[주] ① 본품은 재료 소운반, 식재, 물주기 및 마무리를 포함한다.

② 특수화단(花紋花壇, 리본화단, 舖石화단)은 20%까지 가산할 수 있다.

③ 식재 후 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는

"4-5 유지관리"에 따라 별도 계상한다.

④ 초화류 식재품의 적용은 아래의 조건을 감안하여 적용한다.

㉮ 양호 : 작업장소가 넓고 평탄하며, 식재의 내용이 단순하여 작업속도가 충분히 기대되는 조건인 경우

㉯ 보통 : 작업장소에 교목류, 조경석 등 지장물이 있어 식재 작업에 지장을 받는 경우

㉰ 불량 : 작업장소가 경사지로서 작업조건이 복잡한 경우, 도로변․하천변․절개지 등 안전사고의 위험이 있는 경우

토목/건축

구 분

개 정 전

2013년 적용

비 고

보완

4-3 굴취

4-3-4 관목류 굴취

(주당)

나무높이(m)	조경공(인)	보통인부(인)	운반(적재량) (주)
			2.5톤트럭	4.5톤트럭	8톤트럭
0.3 이하 0.3 ∼0.7 0.8 ∼1.1 1.2 ∼1.5	0.01 0.04 0.08 0.14	0.002 0.006 0.01 0.02	580 373 181 113	996 644 319 201	1,570 1,009 500 315

[주] ① 본품은 근원부에서 분지되어 다년생으로 자라는 수종으로서 광나무, 꽝꽝나무, 목서, 사철나무(둥근형 포함), 치자나무, 팔손이나무, 피라칸사스, 향나무(둥근형), 회양목, 눈향나무, 철쭉, 매자나무, 명자나무, 무궁화, 박태기나무, 병꽃나무, 불두화, 수수꽃다리, 조팝나무, 쥐똥나무, 해당화, 화살나무, 황매화, 흰말채나무, 개나리, 고광나무, 모란, 장미등, 기타 이와 유사한 수종에 적용한다.

② 분은 근원직경의 4배로 한다.

③ 새끼감기는 분크기 36㎝ 이하일 때는 1줄로 감고 36 ∼72㎝인 경우는 2줄로 감고, 72㎝ 이상인 경우에는 3줄로 6㎝ 간격으로 감는다.

④ 굴취는 뿌리를 새끼로 돌려매는 폼을 포함하며 분이 없는 경우는 굴취품의 20%를 감한다.

⑤ 굴취시 야생일 경우에는 굴취품의 20%까지 가산할 수 있다.

⑥ 가마니와 새끼는 별도 계상한다.

⑦ 현장의 시공조건, 수목의 성상에 따라 기계사용이 불가피한 경우 별도 계상한다.

⑧ 나무높이가 1.5m를 초과할 때는 나무높이에 비례하여 할증할 수 있다.

⑨ 나무높이보다 수관폭이 더 클 때는 그 크기를 나무높이로 본다.

⑩ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.

4-3 관목

4-3-1 굴취

(10주당)

나무높이(m)	조경공(인)	보통인부(인)
0.3 미만	0.07	0.01
0.3∼0.7	0.14	0.03
0.8∼1.1	0.22	0.04
1.2∼1.5	0.34	0.06

[주] ① 본 품은 근원부에서 분지되어 다년생으로 자라는 관목수종에 적용한다.

② 본 품은 분 보호재(녹화마대, 녹화끈 등)를 활용하여 분을

보호하지 않은 상태로 굴취되는 작업을 기준한 것이다.

③ 나무높이가 1.5m를 초과할 때는 나무높이에 비례하여 할증할 수 있다.

④ 나무높이보다 수관폭이 더 클 때는 그 크기를 나무높이로 본다.

⑤ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.

⑥ 녹화마대, 녹화끈을 사용하여 분을 보호할 경우

“4-4-1  2. 나무높이에 의한 굴취”를 적용한다.

⑦ 굴취 시 야생일 경우에는 굴취품의 20%까지 가산할 수 있다.

토목/건축

구 분

개 정 전

2013년 적용

비 고

보완

4-4 식재(植栽)

4-4-4 관목류(灌木類) 식재

1. 단식(單植)                                                      (주당)

나무높이(m)	조경공(인)	보통인부(인)	객토(㎥)
0.3미만 0.3 ∼ 0.7 0.8 ∼ 1.1 1.2 ∼ 1.5	0.01 0.03 0.05 0.09	0.01 0.02 0.03 0.05	0.005 0.010 0.025 0.030

2. 군식(群植)(’02년 신설)                                     (주당)

나무높이(m)	조경공(인)	보통인부(인)	객토량(㎥)
0.3미만 0.3 ∼0.7 0.8 ∼1.1 1.2 ∼1.5	0.005 0.013 0.020 0.032	0.004 0.007 0.011 0.018	0.005 0.010 0.025 0.030

[주] ① 본 품은 근원부에서 분지되어 다년생으로 자라는 수종으로서 광나무, 꽝꽝나무, 목서, 사철나무(둥근형 포함), 치자나무, 팔손이나무, 피라칸사스, 향나무(둥근형), 회양목, 눈향나무, 철쭉, 내자나무, 명자나무, 무궁화, 박태기나무, 병꽃나무, 불두화, 수수꽃다리, 조팝나무, 쥐똥나무, 해당화, 화살나무, 황매화, 흰말채나무, 개나리, 고광나무, 모란, 장미 등 기타 이와 유사한 수종에 적용한다.

② 본 품은 터파기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 손질, 뒷정리 등을 포함한다.

③ 운반은 별도 계상한다.

④ 간사지와 염류토에 식재시는 품을 할증할 수 있다.

⑤ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재시는 품을 별도 계상할 수 있다.

⑥ 현장의 시공조건, 수목의 성상에 따라 기계시공이 불가피한 경우는 별도 계상한다.

⑦ 시비가 필요한 경우 비료 및 시비품을 별도 계상할 수 있다.

⑧ 식재시 객토를 할 경우는 식재품의 10%까지 가산할 수 있다.

⑨ 나무높이보다 수관폭이 더 클 때에는 그 수관폭을 나무높이로 본다.

⑩ 나무높이가 1.5m이상일 때에는 나무높이에 비례하여 할증할 수 있다.

⑪ 군식은 일반적으로 아래의 식재밀도 이상인 경우를 말한다.

(주/㎡)

수관폭(㎝)	20	30	40	50	60	80	100
주수	32	14	8	5	4	2	1

⑫ 본 품은 식재에 대한 품으로 식재후 유지관리가 필요한 경우에는

“4-5 유지관리”에 따라 별도 계상한다.

4-3 관목

4-3-2 식재

1. 단식

(10주당)

나무높이(m)	조경공(인)	보통인부(인)
0.3미만 0.3 ∼ 0.7 0.8 ∼ 1.1 1.2 ∼ 1.5	0.15 0.26 0.45 0.68	0.05 0.09 0.15 0.23

[주] ① 본 품은 근원부에서 분지되어 다년생으로 자라는 관목수종에 적용한다.

② 본 품은 재료소운반, 터파기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 손질, 뒷정리를 포함한다.

③ 식재 후 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는

"4-5 유지관리"에 따라 별도 계상한다.

④ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재시는 품을 별도 계상할 수 있다.

⑤ 나무높이보다 수관폭이 더 클 때에는 그 수관폭을 나무높이로 본다.

⑥ 나무높이가 1.5m이상일 때에는 나무높이에 비례하여 할증할 수 있다.

2. 군식

(10주당)

나무높이(m)	조경공(인)	보통인부(인)
0.3미만 0.3 ∼0.7 0.8 ∼1.1 1.2 ∼1.5	0.06 0.10 0.17 0.26	0.02 0.04 0.05 0.08

[주] ①~⑥ 상동

⑦ 군식은 일반적으로 아래의 식재밀도 이상인 경우를 말한다.

(주/㎡)

수관폭(㎝)	20	30	40	50	60	80	100
주수	32	14	8	5	4	2	1

토목/건축

구 분

개 정 전

2013년 적용

비 고

보완

4-2 뿌리돌림

(주당)

근원 직경	조경공	보통 인부	새끼	근원 직경	조경공	보통 인부	새끼
(㎝)	(인)	(인)	(m)	(㎝)	(인)	(인)	(m)
3 5 7 9 11 13 15 18 21 24 30	0.03 0.06 0.11 0.17 0.23 0.30 0.37 0.56 0.65 0.74 1.58	0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.05 0.06 0.08 0.09 0.19	1.0 2.1 4.1 7.2 13.5 18.3 22 25 31 38 52	36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 100	1.86 2.04 2.32 2.79 3.07 4.18 4.65 5.21 6.51 7.06 7.90	0.22 0.25 0.28 0.33 0.36 0.50 0.55 0.62 0.78 0.85 0.95	75 86 108 140 150 162 270 291 324 345 370

[주] ① 분은 근원직경의 4배로 한다.

② 새끼감기는 분크기 36㎝이하일 때 1줄로 감고, 36㎝ ∼72㎝ 인 경우는 2줄로 감고, 72㎝ 이상의 경우는 3줄로 6㎝간격으로 한다.

4-4 교목

4-4-1 굴취

1. 뿌리돌림

(주당)

근원직경	조경공	보통인부	근원직경	조경공	보통인부
(㎝)	(인)	(인)	(㎝)	(인)	(인)
3 5 7 9 11 13 15 18 21 24 30	0.03 0.06 0.11 0.17 0.23 0.30 0.37 0.56 0.65 0.74 1.58	0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.05 0.06 0.08 0.09 0.19	36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 100	1.86 2.04 2.32 2.79 3.07 4.18 4.65 5.21 6.51 7.06 7.90	0.22 0.25 0.28 0.33 0.36 0.50 0.55 0.62 0.78 0.85 0.95

[주] ① 뿌리돌림은 수목 이식 전에  뿌리 분 밖으로 돌출된 뿌리를 깨끗이 절단하여 주근 가까운 곳의 측근과 잔뿌리의 발달을 촉진시키는 작업이다.

② 분은 근원직경의 4∼5배로 한다.

③ 뿌리 절단 부위의 보호를 위한 재료비는 별도 계상한다.

토목/건축

구 분

개 정 전

2013년 적용

비 고

보완

4-3 굴취

4-3-1 나무높이에 의한 굴취

(주당)

나무높이(m)	조경공(인)	보통인부(인)	운반(적재량) (주)
			2.5톤트럭	4.5톤트럭	8톤트럭
1.0이 하 1.1 ∼1.5 1.6 ∼2.0 2.1 ∼2.5 2.6 ∼3.0 3.1 ∼3.5 3.6 ∼4.0 4.1 ∼4.5 4.6 ∼5.0 5.1 ∼5.5 5.6 ∼6.0	0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.15 0.18 0.21 0.25 0.28 0.32	0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05	71 71 52 37 30 17 17 12 12 12 7	126 126 92 67 52 30 30 21 21 21 14	195 195 143 104 83 49 49 36 36 36 26

[주] ① 본품은 곰솔(나무높이 3m이상은 “4-3-3 근원직경에 의한 굴취”적용),

독일가문비나무, 동백나무, 리기다소나무, 섬잣나무, 실편백, 아왜나무, 잣나무, 젓나무, 주목, 측백나무, 편백, 선향나무 등 이와 유사한 수종에 적용한다.

② 분은 근원직경의 4배로 한다.

③ 새끼감기는 분크기 36㎝이하일 때는 1줄로 감고 36 ∼72㎝ 인 경우는 2줄로 감고, 72㎝이상인 경우에는 3줄로 6㎝간격으로 감는다.

④ 굴취는 뿌리를 새끼로 돌려매는 품을 포함하며, 분이 없는 경우는 굴취품의 20%를 감한다.

⑤ 굴취시 야생일 경우에는 굴취품의 20%까지 가산할 수 있다.

⑥ 가마니와 새끼는 별도 계상한다.

⑦ 현장의 시공조건, 수목의 성상에 따라 기계사용이 불가피한 경우 별도 계상한다.

⑧ 나무높이가 6m를 초과할 때는 나무높이에 비례하여 할증할 수 있다.

⑨ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.

4-4 교목

4-4-1 굴취

2. 나무높이에 의한 굴취

(주당)

나무높이(m)	조 경 공(인)	보통인부(인)
1.0이 하	0.06	0.01
1.1 ∼ 1.5	0.07	0.02
1.6 ∼ 2.0	0.08	0.02
2.1 ∼ 2.5	0.10	0.03
2.6 ∼ 3.0	0.11	0.03
3.1 ∼ 3.5	0.13	0.03
3.6 ∼ 4.0	0.15	0.04
4.1 ∼ 4.5	0.17	0.04
4.6 ∼ 5.0	0.19	0.05
비 고	- 분이 없는 경우 굴취품의20%를 감한다.

[주] ① 본 품은 근원(흉고)직경을 추정하기 어려운 수종에 적용한다.

* 곰솔(3m 이하), 독일가문비나무, 동백나무, 리기다소나무, 섬잣나무,

실편백, 아왜나무, 잣나무, 젓나무, 주목, 측백나무, 편백, 선향나무 등 이와 유사한 수종에 적용할 수 있다.

② 분은 근원직경의 4∼5배로 한다.

③ 본 품은 준비, 구덩이파기, 뿌리절단, 분뜨기, 운반준비 작업을 포함한다.

④ 분뜨기, 운반준비를 위한 재료비는 별도 계상한다.

⑤ 굴취시 야생일 경우에는 굴취품의 20%까지 가산할 수 있다.

⑥ 현장의 시공조건, 수목의 성상에 따라 기계사용이 불가피한 경우 별도 계상한다.

⑦ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.

토목/건축

구 분

개 정 전

2013년 적용

비 고

보완

4-3 굴취

4-3-3 근원직경에 의한 굴취

(주당)

근원직경(㎝)	조 경 공(인)	보통인부(인)	운반(적재량) (주)
			2.5톤트럭	4.5톤트럭	8톤트럭
4이하 ∙ ∙ ∙ 30	0.11 ∙ ∙ ∙ 2.20	0.01 ∙ ∙ ∙ 0.31	71 ∙ ∙ ∙	126 ∙ ∙ ∙ 1	195 ∙ ∙ ∙ 4

[주] ① 본 품은 소나무, 감나무, 꽃사과, 노각나무, 느티나무, 대추나무, 마가목, 매화나무, 모감주나무, 모과나무, 목련, 배롱나무, 산딸나무, 산수유, 이팝나무, 자귀나무, 층층나무, 쪽동백, 단풍, 희화나무, 후박나무, 등나무, 능소화, 참나무류등 기타 이와 유사한 수종에 적용한다.

② 분은 근원직경의 4배로 한다.

③ 새끼감기는 분크기 36㎝ 이하일때는 1줄로 감고 분크기 36㎝ ∼72㎝인 경우 2줄로 감고 72㎝이상인 경우에는 3줄로 6㎝간격으로 감는다.

④ 굴취는 뿌리를 새끼로 돌려매는 품을 포함하며 분이 없는 경우는 굴취품의 20%를 감한다.

⑤ 굴취시 야생일 경우에는 굴취품의 20%까지 가산할 수 있다.

⑥ 가마니와 새끼는 별도 계상한다.

⑦ 현장의 시공조건, 수목의 성상에 따라 기계사용이 불가피한 경우 별도 계상한다.

⑧ 근원직경이 30㎝를 초과할 때는 근원직경에 비례하여 할증할 수 있다.

⑨ 본 품은 흉고를 측정할 수 없는 수종에 적용한다.

⑩ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.

4-4 교목

4-4-1 굴취

3. 근원(흉고)직경에 의한 굴취

(주당)

근원(흉고)직경(㎝)	조 경 공(인)	보통인부(인)	굴삭기(hr)	크레인(hr)
4이하	0.08	0.02	-	-
5(4이하)	0.1	0.03	-	-
6∼ 7(5 ∼ 6)	0.17	0.04	-	-
8 ∼ 9(7 ∼ 8)	0.27	0.07	-	-
10 ∼11(9)	0.15	0.06	0.49	-
12 ∼ 14(10 ∼ 12)	0.26	0.08	0.59	-
15 ∼ 17(13 ∼ 14)	0.40	0.10	0.71	-
18 ∼ 19(15 ∼ 16)	0.51	0.11	0.81	-
20 ∼ 24(17 ∼ 20)	0.67	0.13	0.95	0.19
25 ∼ 29(21 ∼ 24)	0.90	0.16	1.15	0.23
30 ∼ 34(25 ∼ 28)	1.12	0.19	1.35	0.27
35 ∼ 39(29 ∼ 32)	1.35	0.22	1.55	0.31
40 ∼ 44(33 ∼ 37)	1.57	0.25	1.74	0.35
45 ∼ 49(38 ∼ 41)	1.80	0.28	1.94	0.39
50 ∼ 54(42 ∼ 45)	2.02	0.31	2.14	0.43
55 ∼ 59(46 ∼ 49)	2.25	0.34	2.34	0.47
60(50)	2.38	0.36	2.46	0.50
비 고	- 분이 없는 경우 굴취품의 20%를 감한다.

[주]  ① 본 품은 교목류 수종에 적용한다.

② 분은 근원직경의 4∼5배로 한다.

③ 본 품은 준비, 구덩이파기, 뿌리절단, 분뜨기, 운반준비 작업을 포함한다.

④ 현장의 시공조건, 수목의 성상에 따라 기계사용이 불가피한 경우 별도 계상한 다.

⑤ 분 뜨기, 운반준비를 위한 재료비는 별도 계상한다.

⑥ 굴취시 야생일 경우에는 굴취품의 20%까지 가산할 수 있다.

⑦ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.

⑧ 장비 규격은 다음을 기준으로 한다.

근원직경	굴삭기	크레인
10cm ∼ 19cm	0.4㎥	-
20cm ∼ 26cm	0.6㎥	트럭탑재형 크레인 10ton
27cm ∼ 39cm	0.6㎥	트럭탑재형 크레인 15ton
40cm ∼ 60cm	0.6㎥	크레인(타이어) 25 ∼50ton

토목/건축

구 분

개 정 전

2013년 적용

비 고

보완

4-4 식재(植栽)

4-4-1 나무높이에 의한 식재

(주당)

나무높이(m)	인력시공		기 계 시 공			객토량(㎥)
	조경공(인)	보통인부(인)	조경공(인)	보통인부(인)	굴삭기(hr)
1.0이하 1.1 ∼1.5 1.6 ∼2.0 2.1 ∼2.5 2.6 ∼3.0 3.1 ∼3.5 3.6 ∼4.0 4.1 ∼4.5 4.6 ∼5.0 5.1 ∼5.5 5.6 ∼6.0	0.07 0.09 0.11 0.15 0.19 0.23 0.29 0.33 0.38 0.43 0.49	0.06 0.07 0.09 0.12 0.14 0.17 0.20 0.23 0.27 0.31 0.36	- - - - - 0.16 0.20 0.22 0.26 0.29 0.34	- - - - - 0.08 0.10 0.11 0.13 0.14 0.16	- - - - - 0.12 0.14 0.16 0.19 0.22 0.25	0.046 0.064 0.099 0.141 0.189 0.241 0.295 0.347 0.403 0.454 0.500

[주] ① 본품은 곰솔(나무높이 3m이상은 “4-4-3 근원직경에 의한 식재” 적용),

독일가문비나무, 동백나무, 리기다소나무, 섬잣나무, 실편백, 아왜나무, 잣나무, 젓나무, 주목, 측백나무 편백, 선향나무 등 이와 유사한 수종에 적용한다.

② 본 품은 터파기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 지주목세우기,

손질, 뒷정리 등을 포함한다.

③ 운반은 별도 계상한다.

④ 지주목을 세우지 않을 때에는 인력품의 20%를 감한다.

⑤ 간사지와 염류토에 식재시는 품을 할증할 수 있다.

⑥ 암반식재, 부적기식재등 특수식재시는 품을 별도 계상할 수 있다.

⑦ 현장의 시공조건, 수목의 성상에 따라 기계 시공이 불가피한 경우는 별도 계상한다.

⑧ 시비가 필요할 경우 비료 및 시비품을 별도 계상할 수 있다.

⑨ 나무 높이가 6m를 초과할 때는 나무높이에 비례하여 할증할 수 있다.

⑩ 식재시 객토를 할 경우에는 식재품을 10%까지 가산할 수 있다.

⑪ 기계시공은 현장여건상 기계시공이 가능한 경우에 대해서만 적용하며, 굴삭기의 규격은 0.4㎥를 기준으로 한다.

⑫ 본 품은 식재에 대한 품으로, 식재후 유지관리가 필요한 경우에는 “4-5 유지관리”에 따라 별도 계상한다.

4-4 교목

4-4-2 식재

1. 나무높이에 의한 식재

(주당)

나무높이(m)

인력시공

기계시공

조경공(인)

보통인부(인)

조경공(인)

보통인부(인)

굴삭기(hr)

1.0이하

1.1 ∼1.5

1.6 ∼2.0

2.1 ∼2.5

2.6 ∼3.0

3.1 ∼3.5

3.6 ∼4.0

4.1 ∼4.5

4.6 ∼5.0

0.07

0.09

0.11

0.15

0.19

0.23

0.29

0.33

0.38

0.06

0.07

0.09

0.12

0.14

0.17

0.2

0.23

0.27

-

-

-

-

-

0.14

0.15

0.15

0.16

-

-

-

-

-

0.07

0.08

0.09

0.11

-

-

-

-

-

0.27

0.31

0.35

0.39

비고

- 지주목을 세우지 않을때는 다음의 요율을 감한다.

인력시공시	기계시공시
인력품의 10%	인력품의 20%

[주] ① 본 품은 흉고 또는 근원직경을 추정하기 어려운 수종에 적용한다.

* 곰솔(3m 이하), 독일가문비나무, 동백나무, 리기다소나무, 섬잣나무, 실편백, 아왜나무, 잣나무, 젓나무, 주목, 측백나무, 편백, 선향나무 등 이와 유사한 종에 적용할 수 있다.

② 본 품은 재료소운반, 터파기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 지주목세우기, 정리를 포함한다.

③ 식재 후 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 "4-5 유지관리"에따라 별도 계상한다.

④ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재시는 품을 별도 계상할 수 있다.

⑤ 현장의 시공조건, 수목의 성상에 따라 기계 시공이 불가피한 경우는 별도 계상한다.

⑥ 굴삭기 규격은 0.4㎥를 기준으로 한다.

토목/건축

구 분

개 정 전

2013년 적용

비 고

보완

4-4 식재(植栽)

4-4-2 흉고직경에 의한 식재

(주당)

흉고직경(㎝)	인력시공		기 계 시 공			객토량(㎥)
	조경공(인)	보통인부(인)	조경공(인)	보통인부(인)	굴삭기(hr)
4이하 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	0.14 0.23 0.32 0.41 0.50 0.59 0.68 0.77 0.86 0.95 1.03 1.12 1.21 1.30 1.39 1.48 1.57 1.66 1.75 1.84 1.93 2.01 2.10 2.19 2.28 2.34 2.39	0.09 0.14 0.19 0.24 0.29 0.35 0.39 0.45 0.50 0.55 0.61 0.66 0.71 0.77 0.83 0.88 0.94 0.99 1.05 1.10 1.16 1.22 1.28 1.33 1.37 1.40 1.44	- - - - 0.32 0.38 0.43 0.49 0.55 0.61 0.66 0.72 0.77 0.83 0.89 0.95 1.01 1.07 1.13 1.18 1.24 1.30 1.36 1.41 1.47 1.50 1.54	- - - - 0.16 0.18 0.21 0.24 0.27 0.30 0.32 0.35 0.38 0.41 0.44 0.46 0.49 0.52 0.55 0.58 0.61 0.63 0.66 0.69 0.72 0.73 0.75	- - - - 0.24 0.28 0.32 0.36 0.40 0.45 0.49 0.53 0.57 0.62 0.66 0.60 0.64 0.68 0.72 0.75 0.79 0.82 0.86 0.90 0.93 0.96 0.98	0.125 0.167 0.217 0.276 0.345 0.423 0.513 0.614 0.727 0.853 0.992 1.146 1.314 1.498 1.698 1.915 2.149 2.402 2.673 2.964 3.275 3.608 3.961 4.337 4.736 5.158 5.604

-뒤에 계속-

4-4 교목

4-4-2 식재

2. 흉고(근원)직경에 의한 식재

(주당)

흉고(근원)직경(㎝)

구   분

조경공(인)

보통인부(인)

굴삭기(hr)

크레인(hr)

4이하

5(6)

6 ∼7(7 ∼8)

8 ∼9(9 ∼11)

10 ∼11(12 ∼13)

12 ∼14(14 ∼17)

15 ∼17(18 ∼20)

18 ∼19(21 ∼23)

20 ∼24(24 ∼29)

25 ∼29(30 ∼35)

30 ∼34(36 ∼41)

35 ∼39(42 ∼47)

40 ∼44(48 ∼53)

45 ∼49(54 ∼59)

50(60)

0.110

0.180

0.280

0.2

0.26

0.33

0.42

0.50

0.60

0.74

0.89

1.04

1.19

1.33

1.42

0.060

0.090

0.140

0.12

0.14

0.16

0.18

0.21

0.24

0.28

0.32

0.37

0.41

0.46

0.48

-

-

-

0.39

0.46

0.56

0.68

0.77

0.91

1.10

1.29

1.48

1.67

1.87

1.98

-

-

-

-

-

-

-

0.22

0.28

0.36

0.45

0.53

0.62

0.70

0.75

비고

- 지주목을 세우지 않을때는 다음의 요율을 감한다.

인력시공시	기계시공시
인력품의 10%	인력품의 20%

-뒤에 계속-

토목/건축

구 분

개 정 전

2013년 적용

비 고

보완

[주] ① 본품은 교목류인 가중나무, 계수나무, 낙우송, 메타세콰이아, 벽오동, 수양버들, 벚나무, 은단풍, 은행나무, 자작나무, 칠엽수,  튜립나무(옥백합), 프라타나스(버즘나무), 현사시나무(은수원사시) 등 기타 이와 유사한 수종에 적용한다.

② 흉고직경은 높이 1.2m 높이의 수간직경을 말한다.

③ 본 품은 터파기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 지주목 세우기, 손질, 뒷정리 등을 포함한다.

④ 운반은 별도 계상한다.

⑤ 지주목을 세우지 않을 때에는 인력품의 20%를 감한다.

⑥ 간사지와 염류토에 식재시는 품을 할증할 수 있다.

⑦ 암반식재, 부적기식재등 특수식재시는 품을 증가할 수 있다.

⑧ 현장의 시공조건, 수목의 성상에 따라 기계시공이 불가피한 경우는 별도 계상한다.

⑨ 시비가 필요한 경우 비료 및 시비품을 별도 계상할 수 있다.

⑩ 식재시 객토를 할 경우는 식재품을 10%까지 가산할 수 있다.

⑪ 흉고직경이 30㎝를 초과할 때는 흉고직경에 비례하여 할증할 수 있다.

⑫ 기계시공은 현장여건상 기계시공이 가능한 경우에 대해서만 적용하며, 굴삭기의 규격은 흉고직경 8 ∼18㎝는 0.4㎥, 흉고직경 19 ∼30㎝는 0.7㎥를 기준으로 한다.

⑬ 본 품은 식재에 대한 품으로, 식재후 유지관리가 필요한 경우에는

“4-5 유지관리”에 따라 별도 계상한다.

[주] ① 본 품은 교목류 수종에 적용한다.

② 본 품은 재료소운반, 터파기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 지주목

세우기, 뒷정리를 포함한다.

③ 식재 후 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는

"4-5 유지관리"에따라 별도 계상한다.

④ 흉고직경은 지표면에서 높이 1.2m 부위의 나무줄기 지름이다.

⑤ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재시는 품을 별도 계상할 수 있다.

⑥ 현장의 시공조건, 수목의 성상에 따라 기계시공이 불가피한 경우는 별도 계상한다.

⑦ 장비 규격은 다음을 기준으로 한다.

흉고직경	굴삭기	크레인
8cm ∼ 17cm	0.4㎥	-
18cm ∼ 22cm	0.6㎥	트럭탑재형 크레인 10ton
23cm ∼ 34cm	0.6㎥	트럭탑재형 크레인 15ton
35cm ∼ 50cm	0.6㎥	크레인(타이어) 25 ∼50ton

토목/건축

구 분

개 정 전

2013년 적용

비 고

보완

“신  설”

4-5 유지관리

4-5-4 제초 및 풀깎기

2. 예초(신설)

(100㎡당)

구분

규격

단위

수량

기계사용 풀깎기

특별인부

-

인

0.11

풀 모으기 및 제거

보통인부

-

인

0.04

비고

- 경사구간에서는 다음의 할증을 적용한다.

구분	경사도	할증율(%)
할증기준	25˚이상	10

- 정기적인 예초작업이 진행되지 않아 대상지역 풀의 밀도가 높고 길이가 길게 자란경우 본 품을 10%까지 가산한다.

[주] ① 본 품은 견착식 기계를 사용한 풀 깎기 작업을 기준한다.

② 풀 모으기 및 제거는 인력에 의한 풀 모으기 및 적재작업을 기준하며 외부운반비, 폐기물처리비는 별도 계상한다.

③ 견착식 기계 경비는 기계사용 풀깎기 품의 10%를 계상한다.

토목/건축

구 분

개 정 전

2013년 적용

비 고

보완

4-6 정원석 쌓기 및 놓기

(ton당)

구 분	공사규모(총시공량)	조경공(인)	굴삭기(hr)
쌓기	20ton 미만	1.212	0.657
	20ton 이상	1.040	0.684
놓기	20ton 미만	0.968	0.657
	20ton 이상	0.836	0.684

[주] ① 본 품은 평지에 자연석 또는 수석을 기술적으로 배치하여  경관을 조성하는 경우에 적용한다.

② 본 품은 다짐 및 정지품이 포함된 것이다.

③ 운반비는 별도 계상한다.

④ 지형 등 작업의 난이도에 따라 20%까지 가산할 수 있다.

⑤ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

⑥ 굴삭기는 0.7㎥를 적용한다.

⑦ 사이목 식재는 별도 계상한다.

2. 조경 유용석 쌓기 및 놓기

“신  설”

4-6 조경구조물

4-6-1 조경석 쌓기 및 놓기

1. 정원석 쌓기 및 놓기

(ton당)

구 분	공사규모(총시공량)	조경공(인)	굴삭기(hr)
쌓기	20ton 미만	1.212	0.657
	20ton 이상	1.040	0.684
놓기	20ton 미만	0.968	0.657
	20ton 이상	0.836	0.684

[주] ① 본 품은 수석, 자연석 또는 조경석을 단독 또는 무리로 설치하여 미관이 고려된 경관을 조성하는 경우에 적용한다.

② 본 품은 다짐 및 정지품이 포함된 것이다.

③ 운반비는 별도 계상한다.

④ 지형 등 작업의 난이도에 따라 20%까지 가산할 수 있다.

⑤ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

⑥ 굴삭기는 0.7㎥를 적용한다.

⑦ 사이목 식재는 별도 계상한다.

2. 조경 유용석 쌓기 및 놓기

(10ton당)

구 분		규격	단위	수량
인력	조경공		인	0.84
	석 공		인	2.51
장비	굴삭기	0.6㎥	hr	5.88

[주] ① 본 품은 조경석이나 현장유용석을 활용하여 긴 선형의 화단, 수로 경계 등의 수직 방향의 사면을 조성하는 경우에 적용한다.

② 본 품은 재료소운반, 위치선정, 쌓기 및 놓기, 다짐 및 정지품이 포함된 것이다.

③ 운반비는 별도 계상한다.

④ 사이목 식재는 별도 계상한다.

토목/건축

구 분

개 정 전

2013년 적용

비 고

보완

4-7 암절개면 보호식재공

(10㎡당)

공종	앵커핀 및 착지핀홀천공			앵커핀 및 착지핀 설치				부착망설치
품목	발전기	인력		앵커핀	착지핀	인력		부착망	철선	인력
규격 두께	50kW	착암공	보통인부	이형철근 Φ16, 0.50m	이형철근 Φ16, 0.35m	특별인부	보통인부	Φ3.2 58×58 PVC 코팅	#8 PVC 코팅	작업반장	특별인부	보통인부
	시간	인	인	개	개	인	인	㎡	m	인	인	인
T=5㎝	0.17	0.11	0.11	1.1	5.0	0.05	0.05	13	8	0.05	0.2	0.2
T=7㎝	0.19	0.12	0.12	2.3	5.0	0.06	0.06	13	13	0.05	0.2	0.2
T=10㎝	0.19	0.12	0.12	2.3	5.0	0.06	0.06	13	13	0.05	0.2	0.2
T=15㎝	0.26	0.16	0.16	4.6	5.0	0.08	0.08	13	17	0.05	0.2	0.2

공종	취부공
품목	R/S 녹생토	종자	취부기	공기 압축기	발전기	트럭 탑재형 크레인	물탱크	덤프트럭	인력
규격 두께	비탈면 녹화용	잔디 혼합종자	25ℓ	21㎥/min	50kW	5톤	5500ℓ	6톤	작업반장	특별인부	기계공	보통인부
	㎥	g	시간	시간	시간	시간	시간	시간	인	인	인	인
T=5㎝	0.55	600	0.45	0.45	0.45	0.52	0.45	0.45	0.05	0.22	0.05	0.38
T=7㎝	0.77	840	0.60	0.60	0.60	0.70	0.60	0.60	0.06	0.27	0.06	0.52
T=10㎝	1.10	1,200	0.80	0.80	0.80	0.90	0.80	0.80	0.08	0.35	0.08	0.70
T=15㎝	1.65	1,800	1.00	1.00	1.00	1.20	1.00	1.00	0.11	0.46	0.11	0.93

-뒤에 계속-

4-7 비탈면 녹화

4-7-1 절토사면 녹화

1.부착망 설치

(10㎡당)

뿜어붙이기 두께

특별인부(인)

보통인부(인)

발전기(hr)

크레인(hr)

t=10cm이하

0.27

0.07

0.23

0.05

t=15cm

0.31

0.09

0.31

0.05

비고

-수직고 20m 이상인 경우 인력품에 다음 할증율을 가산한다.
수직고	20 ∼ 30m	30 ∼ 50m	50m 이상
할증률(%)	20	30	40

[주] ① 본 품은 절토면의 식생기반제 뿜어붙이기를 위한 부착망 설치 작업으로 철망(PVC코팅) 설치를 기준한 것이다.

② 본 품은 자재 소운반, 부착망펼치기, 앵커핀 및 착지핀 설치, 정리 작업을 포함한다.

③ 면 고르기가 필요할 경우 별도 계상한다.

④ 공구손료 및 경장비의 기계경비는 인력품의 2.5%를 계상한다.

⑤ 발전기는 50kW급, 크레인은 트럭탑재형크레인 5ton급을 적용한다.

⑥ 재료량은 아래 기준을 참고한다.

구분	앵커핀(개)	착지핀(개)	부착망(㎡)	철선(m)
규격	Φ16, 0.5m	Φ16, 0.35m	Φ3.258*58 PVC코팅	#8 PVC코팅
t=10cm 이하	2.3	5	13	13
t=15cm	4.6	5	13	17

* 재료할증량은 포함되어 있다.

⑦ 잡재료비는 재료비의 3%를 계상한다.

토목/건축

구 분

개 정 전

2013년 적용

비 고

보완

[주] ① 본 품은 국토해양부에서 신기술로 지정고시한 “비탈면 녹화 공법”을 기준한 것으로 이와 유사한 공법에도 본품을 준용할 수 있다.

② 잡재료는 재료비의 3%로, 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.

③ 앵커핀 및 착지핀 홀 천공시 드릴 및 비트손료는 천공품의 2.5%를 계상한다.

④ 본품은 재료할증을 포함하여 산정한 것이다.

⑤ 본품은 면고르기품이 포함되지 않은 것이다.

⑥ R/S 녹생토란 식생기반 조성을 위해 특수 배합된 인공토양을 말한다.

⑦ 시공두께 적용기준 : 시공두께는 절개지역의 경사, 토질 및

암질에 따라 다음과 같이 구분․적용할 수 있다.

시공두께	적 용 대 상 지 역	비 고
T=5㎝	구배가 1 : 1 이하의 완만한 경질토 또는 자갈섞인 토사지역	경사가 보다 완만한 지역은 망설치 생략
T=7㎝	구배가 1 : 1 내외의 고사점토, 마사토 지역 또는 호박돌 및 자갈섞인 지역
T=10㎝	구배가 1 : 0.7내외의 완만한 풍화암, 연암지역 또는 보통암이 약간 혼재된 지역
T=15㎝	구배가 1 : 0.5내외의 보통암 및 경암지역	구배가 1 : 0.3보다 급한 지역은 식생이 불량

⑧ 수직고 20m 이상인 경우에는 인력품에 다음의 할증률을 가산한다.

수 직 고	20∼30m미만	30∼50m미만	50m이상
할 증 률 (%)	20	30	40

4-7 비탈면 녹화

4-7-1 절토사면 녹화

2. 식생기반제 뿜어붙이기

가. 기계기구 설치 및 해체

(회)

구분	단위	수량
특별인부	인	2
보통인부	인	0.5
크레인	hr	4

[주] ① 본 품은 식생기반재 뿜어붙이기 작업을 위한 기계기구 설치작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 장비세팅, 배관연결, 시험운전, 작업 후 해체정리 작업을 포함한다.

나. 뿜어붙이기

(10㎡당)

구분

조경공

기계

설비공

특별

인부

보통

인부

취부기

공기

압축기

발전기

트럭

탑재형

크레인

물탱크

덤프

트럭

25ℓ

21㎥/min

50kW

5톤

5500ℓ

6톤

단위

인

인

인

인

hr

hr

hr

hr

hr

hr

T=5cm

0.04

0.04

0.08

0.07

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

T=7cm

0.05

0.05

0.10

0.09

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

T=10cm

0.07

0.07

0.14

0.12

0.51

0.51

0.51

0.51

0.51

0.51

T=15cm

0.10

0.10

0.19

0.18

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

비고

- 수직고 20m이상인 경우 인력품에 다음 할증율을 가산한다.

수직고	20 ∼ 30m	30 ∼ 50m	50m이상
할증율(%)	20	30	40

[주] ① 본 품은 식생기반제와 종자를 혼합하여 비탈면에 뿜어붙이 기는 작업을 기준한 것으로 비탈면 녹화를 위한 유사공법에 적용할 수 있다.

② 재료량은 각 공법의 설계기준에 따라 계상한다.

③ 잡재료는 재료비의 3%로, 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.

토목/건축

￭ 부 록 (내역서 및 일위대가표)

※ 내역서 및 일위대가표

- 엑셀파일

- EBS파일 및 EBS코드표

※ 한국조경학회 및 한국조경사회 홈페이지 참조

- 한국조경학회 : http://www.kila.or.kr/