노지재배수목에 대한 컨테이너 시험재배

대상자 지정공고

본 학회에서 수행 중인 「하자저감을 위한 조경수목 선진화방안 연구용역」중에서 노지재배수목에 대한 컨테이너 시험재배 대상자를 선정하기 위한 대상자 지정신청서 제출에 관한 안내사항을 다음과 같이 공고합니다.

2018 년   1 월   9 일

(사)한국조경학회

1. 용역개요

가. 용 역 명 : 노지재배수목에 대한 컨테이너 시험재배 대상자 지정

나. 용역금액 : 21,509,120원

다. 용역기간 : 2018년 1월 ~ 2018년 11월

2. 제안서 제출

가. 제출일시 및 장소

❍ 제출기간 : 2018. 1. 10. ~ 2018. 1. 17.

❍ 제출장소 : (사)한국조경학회 (전화안내 : 02-565-2055, 02-6490-5511)

❍ 제출방법 : 우편접수

※ 접수처 : 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 한국과학기술회관

신관 1007호 (사)한국조경학회

나. 제출서류

❍ 회사채에 대한 신용등급 1부.

❍ 노지재배수목에 대한 컨테이너 시험재배 구축 및 운영 계획서 1부.

❍ 조경수생산 경력(실적) 입증서류 1부.

❍ 기술력 입증자료 제시 각1부.

- 보유 기술(특허 등)현황

- 보유 농장 현황(수목, 농장 등 사진자료 등)

- 보유 인력 현황

3. 위탁대상자 신청자격

❍ 조경수 생산경험이 3년 이상인 자

4. 위탁대상자 선정방법

❍ 1차 : 서류심사

❍ 2차 : 필요 시 현지실사 가능

※ 계약방법 : 낙찰자선정방법 : 협상에 의한 계약(기술가격종합평가), 합산비율(100) : 기술 80, 가격 20

※ 공모 신청자가 1인 이하일 경우 적격점수 85점 이상인 경우를 우선 협상 대상자로 한다.

5. 시험재배 수종

❍ 소나무 등 23수종 총 483주(근원직경 10㎝ 내외)

❍ 시험재배 관리 위탁 받은 자가 시험처리 할 수종과 그 규격․수량은 (사)한국조경학회에서 정하는 바에 따른다.(붙임1. 참조)

❍ 시험재배한 수목은 추후 LH공사 현장에서 사용하거나 협의하여 구입한다. (계약이후 협의)

6. 평가요소와 평가방법

가. 평가방법

① 제안서는 기술능력과 입찰가격을 종합적으로 평가하며 기술능력평가 배점 80점과 입찰가격평가 배점 20점을 합하여 총 100점으로 한다. 제안서 평가 결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도(80점)의 85%이상인 자를 협상적격자로 선정한다.

② 제안서에 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완을 요구하며, 기한까지 보완 요구한 서류가 불명확하여 심사가 불가능한 경우에는 평가에서 제외한다.

③ 제안서는 제안서 평가위원회의 심의과정을 거치며, 제안서에 기재되지 않은 사항은 평가하지 않는다.

나. 평가항목 및 배점

	평가항목 (점수비율)	평가세부항목				평가 점수
		유 형			점수구성
계량 평가	생산경험 (10)	◦수목생산 경력			◦10년 미만 (5) ◦10~15년 (8) ◦15년 이상 (10)
	회사채에 대한 신용등급 (10)	회사채	기업어음	기업신용
		A- 이상	A2- 이상	BBB0	◦10
		BBB+,BBB0,BBB-	A3+,A30,A3-	BBB-	◦10
		BB+, BB0	B+	BB+, BB0	◦10
		BB-	B0	BB-	◦9
		B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	◦8
		CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	◦5
	운영능력 (40)	◦시험재배 구축 및 운영계획서 내용			◦미흡 (25) ◦보통 (30) ◦우수 (35) ◦매우탁월 (40)
	가격평가(20점)	◦협상에 의한 계약체결기준(계약예규)
비계량평가	기술능력 (20)	◦기술력 입증자료			◦미흡 (5) ◦보통 (10) ◦우수 (15) ◦매우탁월 (20)

다. 기타 고려사항

❍ 기술능력 평가 시 고려할 점

① 조경수 재배에 대한 지식

② 수목 단근처리 및 컨테이너 재배에 관한 지식

③ 수목의 생리․병해 등에 대한 지식

④ 토양․비료 등 지식

❍ 제안서 기술평가 관련사항

- 평가기관 : 제안서 제출기관

7. 제안서 작성

❍ 제안내용서(붙임 1)를 참조하여 제안서(붙임 2)를 작성하여 제출

주요내용	❍ 노지재배수목에 대한 컨테이너 시험재배 구축 및 운영 계획서 ① 시험재배 대상수종 선정 및 시험처리 대상지 ② 단근처리 및 컨테이너 이식 방법 ③ 시험재배 수목 모니터링 계획 ④ 생산량 및 뿌리발달 등 모니터링에 소요되는 수목단가 ⑤ 시험재배 수목 운영관리 계획

8. 기타사항

❍ 제출서류 중 허위 기재사항 발견 시 무효처리한다.

❍ 시험재배 대상자로 선정된 업체는 당사자에게 개별 통지한다.

< 붙임 1 > 제안내용서

노지재배수목에 대한 컨테이너 시험재배 계획

1. 대상수종 및 규격

❍ 대상수종은 식재빈도가 높고 하자율이 높은 교목 23종을 선정

❍ 상록수:낙엽수 비율(3:7)을 고려하여 상록교목 6종, 낙엽교목 14종으로 배분하고, 기후온난화 반영 상록활엽 3종을 선정함

❍ 규격 및 수량 : 소나무 등 23수종(근원직경 10㎝ 내외), 총 483주

□ 시험재배 대상수종 규격 및 본수

구분	수종	규격	수량(주)	위치	비고
상록침엽수 6종	소나무	H4.0*R15	21
	곰솔(해송)	H3.5*R12	21
	스트로브잣나무	H2.0*W1.0	21
	서양측백	H2.5*W0.8	21
	주목	H2.5*W1.2	21
	섬잣나무	H2.5*W1.2	21
낙엽활엽수 14종	노각나무	H3.5*R10	21
	느티나무	H3.5*R10	21
	산수유	H3.0*R10	21
	왕벚나무	H3.5*B8	21
	상수리나무	H3.5*R10	21
	산사나무	H3.0*R10	21
	산딸나무	H3.5*R10	21
	때죽나무	H3.5*R10	21
	자작나무	H3.5*B8	21
	칠엽수	H3.0*R10	21
	배롱나무	H3.0*R10	21
	목련	H3.0*R10	21
	대왕참나무	H3.5*R10	21
	팥배나무	H4.0*R10	21
상록활엽수 3종	종가시나무	H4.0*R10	21
	녹나무	H3.0*R10	21
	홍가시나무	H2.0*W1.0	21
합 계			483

2. 추진일정

□ 시험재배 수행절차

				수목선정
				수목검수
	① 단근삽 이용 뿌리절단			② 컨테이너 모듈			③ 노지-컨테이너 이식 재배
	뿌리절단			뿌리절단			굴취 및 이동
				뿌리확산 방지시설 설치			컨테이너 이식
							관수, 지주 시설 설치
				관수(발근촉진제)
				모니터링 1 ~ 4차 (연구용역사업단 실시)

□ 시험재배 수행일정

일 정	내 용	비 고
2018년 1월	⦁시험수목 선정 및 검수	시험재배 대상자
2018년 2월	⦁지주 및 관수 기반시설 설치 - 컨테이너 이식 수목
2018년 3월	⦁단근 및 모듈 설치, 컨테이너 이식 - 관수포함
2018년 4월	⦁1차 모니터링	연구용역 사업단 & 시험재배 대상자
2018년 6월	⦁2차 모니터링
2018년 8월	⦁3차 모니터링
2018년 10월	⦁4차 모니터링/세근발달 분석
2018년 11월	⦁시험재배 결과도출

3. 시험구 설치

가. 처리방법 및 비율

❍ 단근삽 이용 뿌리절단(뿌리돌림), 컨테이너 모듈(뿌리확산 방지시설 설치), 노지-컨테이너 이식 재배 3처리구 이며 처리구당 그 비율은 7개 : 7개 : 7개로 실시함

□ 노지재배수목에 대한 컨테이너 시험재배 모식도

① 단근삽 이용 뿌리절단, ② 컨테이너 모듈, ③ 노지-컨테이너 이식 재배

① 단근삽 이용 뿌리절단(뿌리돌림)

❍ 단근삽을 이용하여 너비 3.5D, 깊이 15㎝의 원형으로 뿌리돌림을 실시하고, 1회 관수(발근촉진제 포함) 후 특별한 조치를 하지 않음

② 컨테이너 모듈(뿌리확산 방지시설 설치)

❍ 뿌리돌림을 ‘삽 이용 단근’과 동일하게 실시한 후,

❍ 너비 4D 구간에 원형으로 뿌리확산 방지를 위한 컨테이너 모듈을 설치하고 내외부에 굴착한 흙을 다시 채움

❍ 1회 관수(발근촉진제 포함) 후 특별한 조치를 하지 않음

※ 컨테이너 용기 모듈 : 컨테이너의 바닥부분은 없으며 측면 벽체는 여러 개의 판 형태로 제작되어 분리 및 체결이 가능

③ 노지-컨테이너 이식 재배

❍ 정분(4D) 규격으로 굴취하여 직경 5D 규격의 뿌리발달용 특수컨테이너(Air-Port)에 이식하고 컨테이너 안에 생육상토(원예용 상토)를 넣음

❍ 컨테이너 이식 시 최초 1회 관수는 발근촉진제를 포함하여 실시함

❍ 컨테이너 수목이 바람에 의하여 넘어지는 것을 방지하기 위하여 지주시설을 설치하고, 지속적인 관수와 시비를 실시하기 위하여 관ㆍ시비시스템을 설치함

4. 모니터링(연구용역 사업단 수행)

가. 단근처리 (단근삽 이용 뿌리절단, 컨테이너 모듈)

❍ 시험구 조성 후 매 2달마다 뿌리분을 열어 세근발달과 생장량을 사진을 통해 상태를 관찰(총 4회 실시, 처리구당 3개 조사))

❍ 총 4회의 뿌리발달 상태점검 중 마지막 차에는 수종별로 1개를 굴취(분뜨기)하고 뿌리분을 세척하여 전체적인 뿌리발달 상태 비교․분석

나. 노지-컨테이너 이식 재배

❍ 2달마다 컨테이너를 일부 열어 세근이 컨테이너 내부 벽에 도달하였는지 여부를 사진을 통해 상태를 관찰(총 4회 실시)

❍ 총 4회의 뿌리발달 상태점검 중 마지막 차에는 수종별로 1개의 뿌리 분을 세척하여 전체적인 뿌리발달 상태 비교․분석

<붙임 2> 제안서(시험재배 계획) 작성

Ⅰ. 용역 개요

1. 용역명

◦

Ⅱ. 제안기관 현황

1. 일반현황

◦ ☞제안기관의 일반현황 및 주요연혁을 기술한다.

◦

◦

◦

◦

2. 기술력 입증자료

◦ ☞제안기관의 재배 및 생산기술력을 입증할 수 있는 자료(보유 기술, 농장, 인력 등) 기술한다.

◦

◦

◦

◦

Ⅲ. 제안 내용

1. 제안개요

2. 시험재배 구축 및 운영계획 내용

3. 용역 수행조직 및 업무분장

가. 수행조직

4. 용역기간(추진일정)

가. 소요기간 :  2018년   월   일 ～ 2018년   월   일(  월)

나. 세부추진일정

용 역 내 용	월 별 추 진 일 정												비 고
(예시) ⦁시험수목 선정 및 검수 ⦁지주 및 관수 기반시설 설치 - 컨테이너 이식 수목 ⦁단근 및 모듈 설치, 컨테이너 이식 - 관수포함
추진진도(%)