과  업  지  시  서

「평화공원 화합의 뜰 조성사업 실시설계용역」

2023. 3.

부산광역시(공원정책과)

목 차

1.	설 계 설 명 서
2.	과 업 지 시 서

1. 설 계 설 명 서

설 계 설 명 서

1. 과 업 명 : 평화공원 화합의 뜰 조성사업 실시설계용역

2. 과업의 배경 및 목적

가. 우리 시에서는 유엔기념공원 및 주변 문화시설 활성화를 통해 “세계 평화와 글로벌 문화 중심도시부산”을 도모하기 위한 유엔 평화문화공원화사업을 추진하고 있음.

나. 유엔 평화문화공원화사업의 평화역사 인프라확충 일환으로 추진되는 상기 용역은 유엔기념공원과 인접한 평화공원의 과거 냉전시기 아픔의 장소 의미를 극복하고, 세계 각국의 화해와 치유 및 화합을 위한 상징적 공간을 조성하기 위함.

다. 산림청 기후대응기금으로 추진하는 도시숲 조성으로 도심열섬 및 폭염 완화, 미세먼지 저감 등 기후변화 대응에 기여

3. 과업의 범위

가. 공간적 범위

1) 위  치 : 부산광역시 남구 대연동 697번지 일원(평화공원)

2) 면  적 : A=32,015㎡ (현장여건에 따라 조정 가능)

나. 내용적 범위

1) 관련계획 자료조사 및 수립

2) 현황측량

3) 실시설계

○ 조경식재 및 조경시설물설계(수목식재, 이식 및 시설물 배치 등)

○ 토공,우․오수공 및 기반시설 조성 등

○ 경관조명시설, 폐기물처리 등 부대공 설계

4) 도시계획시설사업 인가

5) 성과품 작성

○ 설계도면 및 공사시방서

○ 설계예산서(설계설명서, 설계내역서, 수량 및 단가산출서 등)

○ 도시계획시설사업 인가 협의 서류

○ 기타 사업집행에 필요한 각종 서류

4. 과업수행기간

가. 이 용역의 과업기간은 착수일로부터 180일간(6개월)으로 하고 수급인은 다음의 경우에 부산광역시장 또는 그 위임을 받은 자에게 서면으로 계약기간의 변경을 청구하여야 한다.

1) 관계기관의 협의 및 검토가 관계기관의 사유로 지연되었을 때

2) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

3) 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

나. 예정공정표

일 정 공 종	10일	20일	30일	50일	70일	90일	120일	150일	180일	비고
1.현지조사 및 측량
2.실시설계
- 기본구상 및 계획
- 실시설계 도서 작성
- 수량/단가/일위대가 등
- 설계내역서
3.도시계획시설사업 인가
4.성과품작성

5. 설계용역 변경 조건

가. 본 과업에서 계상된 실제 수량과 상이한 경우 예산금액 범위 내에서 정산

나. 발주처의 사정으로 부득이 과업범위 및 계획이 변경될 때

다. 과업물량의 증․감 발생 시

라. 기타 시행청이 필요하다고 인정될 때 등

6. 설계용역 참여업체 범위

가.「엔지니어링산업진흥법」 제21조에 의거 건설부분(조경) 전문분야 신고를 필한 업체 또는 「기술사법」 제6조의 규정에 의거 건설부분(조경)에 대한 기술사사무소 개설을 등록한 업체

나. 설계용역 계약 시 필요한 경우 면허 보완을 위해 아래 항목의 면허(자격)을 소지하고 있어야 하고, 아래 항복의 면허가 없을 경우 항목별 면허(자격) 보유업체와 공동도급(분담이행방식) 계약 체결하여야 함.

1)「전련기술관리법」제14조 규정에 의거 전력종합설계업 또는 전력전문설계업(1종) 신고된 업체 또는

「기술사법」제6조의 규정에 대한 기술사사무소로 등록업체로 신고를 필한 업체

2)「엔지니어링산업진흥법」 제21조 의거 건설부분(도시계획) 신고된 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에대한 기술사사무소로 등록업체로 신고를 필한 업체

2. 과 업 지 시 서

1. 과업의 개요

가. 과업의 목적

‣ 우리 시에서는 유엔기념공원 및 주변 문화시설 활성화를 통해 “세계 평화와 글로벌 문화 중심도시부산”을 도모하기 위해 유엔 평화문화공원화사업을 추진하고 있음.

‣ 유엔 평화문화공원화사업의 평화역사 인프라확충 일환으로 추진되는 상기 용역은 유엔기념공원과 인접한 평화공원의 과거 냉전시기 아픔의 장소 의미를 극복하고, 세계 각국의 화해와 치유 및 화합을 위한 상징적 공간을 조성하기 위함.

‣ 산림청 기후대응기금으로 추진하는 도시숲 조성으로 도심열섬 및 폭염 완화, 미세먼지 저감 등 기후변화 대응에 기여

나. 기본구상 및 계획

‣“유엔기념공원 중심 세계평화문화공원화 기본계획”을 참고하여 계획 수립하고, 유엔 기념공원 및 주변문화시설

활성화방안에 따라 추진 예정인 사업(유엔 평화의 숲, 유엔기념공원 기념정원 등)과도 연계될 수 있도록 계획 수립

‣“세계 평화와 글로벌 문화 중심도시부산”을 도모하기 위한 유엔 평화문화공원화 사업의 목적에 부합되게 해당공간의 지역적 특성을 고찰하고 장소성과 의미를 부여하여 지역의 이미지를 고양시키고 도시경관을 향상시킬 수 있는 공간이 되도록 계획함.

‣ 향후 활용할 수 있는 문화콘텐츠 및 프로그램을 기반으로 공간 및 시설을 배치하고 기존 공원 시설(기념조형물 등) 및 향후 설치 예정인 시설(리차드위드컴장군 동상 등)과도 조화롭게 계획

다. 과업의 명칭 : 평화공원 화합의 뜰 조성사업 실시설계용역

라. 과업의 범위

‣ 위    치 : 부산광역시 남구 대연동 697번지 일원(평화공원)

‣ 규    모 : A=32,015㎡ (현장 여건에 따라 조정가능)

‣ 과업기간 : 180일(6개월)

마. 과업의 주요내용

가. 관련계획 자료조사 및 수립	나. 현황측량
다. 실시설계 수립	라. 도시숲 등의 조성관리 심의, 주민설명회 등 행정절차 이행
마. 도시계획시설사업 실시계획인가 등 절차이행	바. 실시설계 성과도서 작성 제출

바. 보고 및 협의

• 착수보고 : 계약일로부터 30일 이내

• 중간보고 : 계약일로부터 120일 이내

• 최종보고 : 계약일로부터 180일 이내

• 수시협의 : 필요시 수시협의 진행

2. 일반사항

가. 과업수행 기준

1) 본 과업지시서에는 “평화공원 화합의 뜰 조성사업 실시설계용역”과업수행에 필요한 사항을 규정하였으며, 모든 과업은 본 과업지시서에 의하여 성실히 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령과 관계 규정, 정부 제정 각종 시방서에 의거 사전 감독관과 협의 후 수행하여야 한다.

2) 본 용역 성과품에는 사업시행에 필요한 전반적인 사항을 명확히 작성 반영하여 본 사업이 차질 없게 추진

되도록 하여야 하며, 사업 완료시까지 도급인의 책임에 관한 사항에 대하여 성실히 의무를 다하여야 한다.

3) 본 과업 수행 중 용어 해석과 의견의 차이점은 상호 협의하여 결정하되 협의가 이루어지지 않을 경우 발주자의 해석에 따른다.

4)「공공 건설공사 공사기간 산정기준(국토교통부 훈령 제1140호)」의 규정에 따라 공사기간이 적정하게 산정되어야 하며, 공사기간 산출근거 제시할 수 있어야 함.

나. 설계용역자의 성실 등의 의무

1) 본 설계용역 수행자는 평화공원 화합의 뜰 조성을 위하여 조경 분야에 학식과 경험이 풍부한 특급기술자 이상의 자격을 가진 자로 과업수행팀을 구성하여 원활하게 수행해야 한다.

2) 과업수행 중 대리인 등 과업수행 기술자가 부적당하다고 판단되거나 태만하다고 인정될 때에는 발주자는 즉시 교체를 명할 수 있으며 도급인은 이의 없이 따라야 한다.

3) 설계용역자는 본 과업을 성실히 수행하여야 하며, 관련시설의 미관, 기능 및  구조상 지장이 없도록 설계하고 본 과업의 질적 향상에 노력하여야 한다.

4) 계약체결후 7일 이내에 과업을 착수하여야 한다.

다. 보안 및 비밀준수

1) 설계용역자는 본 과업 지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종 보고서 등 기타 자료 및 이에 의하여 얻은 지식을 개인 또는 특정 단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출 시켜서는 안되며, 과업폐기물은 소각처리를 원칙으로 한다.  또한 과업수행 시 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 설계 용역자가 진다.

라. 업무수행

1) 관련부서 등 협의충실

○ 설계용역자는 본 과업을 수행함에 있어 관련부서와 수시로 협의하고 그 의견을 충분히 검토 반영하여야 한다.(필요시 협의록 작성, 제출)

○ 설계 업무에 관련된 실무자 및 전문가의 의견과 자문을 득하여 설계에 반영하여야 하며, 의견 및 자문사항은 그 조치결과를 제출하여야 한다.

2) 설계자료 조사 성실

○ 설계용역자는 설계 등을 진행함에 있어 충분한 자료를 수집, 조사하여야 하며, 안전하고 경제적이며 최신시설이 되도록 노력하여야 하며, 우리 시에서 필요하다고 할 경우 유사한 시설물을 현장 견학하여 외관, 기능, 마감자재, 유지관리, 문제점 등을 검토 분석한 후 설계에 반영하고 그 결과를 제출하여야 한다.

3) 회의참석 등

○ 설계용역자는 본 과업과 관련된 해당 도시숲 등 조성관리 심의위원회 등에 참석 설명하고, 질의에 답변토록 해야한다.

4) 보고 등 의무 성실

○ 설계용역자는 아래 각 사항에 대하여 일반적인 사항 또는 당초 계획과 변경이 있을 경우 사전 보고한 후 검토된 자료에 의거 과업을 진행한다.

(1) 설계자료 또는 통계 조사연구 적용 및 개선 등에 관한 사항

(2) 새로운 기술도입에 관한 사항

(3) 공사비, 공사기간 등

(4) 기술인력 구성에 관한 사항

(5) 기타 지시 받은 사항

○ 도시숲 등의 조성․관리 심의위원회 심의를 거쳐야 하며 심의 결과를 실시설계에 반영하여야 한다.

○ 우리시가 본 과업 진행상 필요하다고 인정할 경우 관계전문가 및 관계기관의 자문을 들어야 한다.

○ 과업의 진척보고는 감독원을 경유 서면으로 보고해야 하며, 실시설계 보고 등 감독원이 필요하다고 지시하는 경우 제반 추진내용을 책임기술자가 보고해야 한다.

○ 용역자는 용역완료 시까지 용역진행 상황 종합점검을 위하여 최소 3차례(착수보고, 중간보고, 최종보고 등) 이상 보고회를 개최하여 진행사항을 성실히 보고하여야 한다.(실시설계 완료전, 기타)

5) 자료제출 성실

○ 설계용역자는 과업수행중 심의회 등을 위하여 자료제출 요구가 있을시 이에 응하여 제출하여야 하며, 자료 제출 등으로 인한 비용은 설계용역자가 부담한다.

6) 용역착수시 제출서류

○ 설계용역자는 용역계약 일반조건 제5절 용역계약 이행을 준수하여 계약 후 7일이내 아래와 같이 서류를 구비하여 제출하여야 한다.

(1) 착수계, 사업수행계획표, 용역수행 예정공정표

(2) 설계용역 수행 기술진 구성 현황 : 공종별 명단, 자격증 사본, 이력서

(3) 보안각서 : 성명, 주민등록번호, 직위 등을 명기하고 서명 또는 날인

7) 하도급 용역을 하여야 할 경우 관련법(건설기술용역 하도급 관리지침)에 의한 전문설계 용역업체에 하도급을 하되 우리시에 신고(하도급 용역자의 기술진현황 포함)하여 승인을 득하여야 한다.

마. 관계사항 숙지의무

1) 설계용역자는 본 과업지시서 내용과 본 용역시행 관련 전반사항을 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 아니하여 발생되는 사항에 대하여는 설계용역자가 책임을 진다.

2) 본 과업지시서에서 정하지 않거나 누락된 부분에 대하여는 우리시와 협의하여야 하며, 이견이 있을 경우 우리시의 의견에 따른다.

3) 기타 경미한 사항은 협의하여 시행하며, 이에 소요되는 비용은 설계용역자가 부담한다.

4) 본 과업을 수행함에 있어 설계용역자는 제반 여건조치를 하여야 하며 본 과업으로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 설계용역자가 손실 보상을 하여야 한다.

5) 설계용역자는 각종 행정 절차상의 승인, 협의, 인․허가를 완료할 수 있도록 제반 조치를 취하여야 하며, 필요시 관계기관의 협의에 따른 필요한 보완관련 자료를 작성 제출하여야 하며, 용역기간 내 행정절차를 완료하여야 한다.

6) 설계도서 작성은 국토교통부 고시의 설계도서 작성기준에 의하여 작성하여야 하며 설계도면에 설계자, 제도자, 검수자, 확인자 등의 설계도서 작성자 서명 날인하여야 한다.

7) 본 용역설계에 의하여 공사 시행중 주요사항이 누락되어 설계변경이 필요한 경우 즉시 설계변경을 이행하여야 하고 이에 따른 대가를 요구할 수 없다.

8) 계획평면도 작성지연으로 인한 타 공종설계 용역기간이 축소가 되지 않도록 하여야 하며, 이로 인한 책임은 계약자에게 있다.

바. 용역기간 연장 : 다음과 같이 부득이한 경우에는 용역기간을 연기할 수 있다.

1) 추가과업, 특별업무수행, 조사물량 증가 등으로 용역기간 연장이 불가피한 때

2) 각종 심의, 협의, 우리시와의 사정으로 작업중지 또는 연기의 필요가 있을 때

3) 천재지변 등 부득이한 사정으로 연기가 불가피하다고 우리시가 인정할 때

사. 변경 및 정산

1) 본 과업의 일부 또는 전부를 중지시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정할 때에는 설계용역자에게 이 사실을 요구할 수 있으며, 설계용역자는 우리시의 방침에 따라야 한다.

2) 과업 범위의 증감이 발생할 경우는 당해 계약금액을 조정 또는 정산의 근거는 별첨의 “설계용역 설계예산서”에 따른다. 다만, 과업범위의 현저한 변경이 없이 기본설계 또는 실시설계 결과 설계예산서상 기준 공사비를 초과한 범위에 대하여는 용역비의 증액 지급이 불가하다.

아. 특별 의무사항

1) 설계용역자는 성과품 납품후에라도 시공시 관계자의, 각종 도면요구 등 우리시의 자문에 성실히 응하여야 하며 과업수행 서류에 위 내용을 포함한다.

자. 기타사항

1) 시방서에 건설업자가 공사진행 단계별로 작성하여야할 시공상세도 목록 및 시공상세도 작성기준을 제시하여야 한다.

2) 신기술의 적용가능여부를 검토하여 설계보고서에 수록, 제출하여야 한다.

3) 각종 설계도서는 국토교통부 제정 설계도서 작성기준에 의하여야 한다.

4) 설계도서 작성시 조달청, 우리시와, 관련기관, 기타 관련업체가 상호 호환이 가능한 적산프로그램(EXCEL)으로 작성하여야 한다.

차. 관계법규 조사

1) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

2) 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률

3) 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률

4) 건설공사 관련법규

5) 오수․분뇨 및 축산폐수에 관한 제반법규

6) 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법 및 동 시행령 동 시행규칙

7) 한국공업규격

8) 국토교통부제정 각종 표준시방서 및 설계기준, 각종 건설공사 설계지침서

9) 기타 국내․외 전문서적 및 기준

10) 도시기초시설물 설치․관리 기준

11) 대기․수질보존법 및 환경관련 제반 법규

12) 기타 공사 시행에 필요로 하는 법령

3. 기초조사 및 측량

가. 기초조사

1) 일반사항

○ 본 조사는“평화공원 화합의 뜰 조성사업 실시설계용역”에 대한 기초조사로서 주변 및 지형현황, 기반시설, 공원녹지, 관련 계획 등의 자료를 입수하여 원활한 계획이 수립되도록 하여야 한다.

○ 기초조사는 본 사업과 관련하여 추후 예정된 모든 공정의 기초가 되는 공종으로 설계의 근거를 제시할 수 있도록 가능한 한 풍부한 내용을 담보할 수 있도록 실시하여야 한다.

○ 기초조사는 후속 공정인 실시설계 시에 고려하여야 할 모든 인자에 대하여 조사․분석하여 제시하여야 하고, 특이 사항에 대하여는 별도로 분류하여 감독원에게 보고하여야 한다.

○ 현장조사에 앞서 각종 지형도를 입수하여 도상에서 예비조사를 실시한 후, 주요 인자에 대하여 현장답사를 실시하여야 한다.

○ 본 과업의 목적을 감안하여 기존 수목식재 공간 및 시설을 포함한 주변 시설을 이용하는 주민들의 불편사항 및 개선 요구를 조사하여 설계에 반영하여야 한다.

○ 사업구간의 지상지장물(전선 등) 및 지하매설물(한전케이블, 상수도, 통신케이블, 도시가스 등)을 조사하여야 한다.

○ 현황조사에 앞서 지형도(각종), 기타 수집한 자료 등을 참고로 도상에서 예비조사를 실시하고, 기 개설된 현황도로와 도시계획선형 및 주변 접속도로의 교통시설 현황 등을 조사한다.

2) 기초조사의 시행

○ 간섭구조물 조사

- 본 과업에 영향을 미칠 수 있는 각종 시설의 위치 및 규격에 대하여 조사하여야 한다.

- 구조물 설계 시 연계성을 고려하여야 하는 사항에 대해서도 조사하여야 한다.

○ 지장물 조사

- 본 과업과 관련이 있는 지장물에 대하여 상세히 조사하여야 한다.

- 기타 본 과업의 공사에 영향을 미칠 수 있는 전원 공급을 위한 전주, 시민 생활에 제공되는 상수도, 도시가스 등 각종 인자에 대하여 조사를 실시하여야 한다.

○ 지하 매설물 조사

- 본 과업과 관련이 있는 전기선로, 통신선로 등 지중선로에 대하여 조사하여야 한다.

- 본 과업과 관련이 있는 상수관로, 하수관로, 도시가스관, 암거 등에 대하여 조사하여야 한다.

○ 재료원 조사

- 목재, 시멘트 등 각종 재료원에 대하여 조사하여 설계에 반영하여야 한다.

나. 측  량

1) 측량의 범위

○ 위치 : 부산광역시 남구 대연동 697번지 일원(평화공원)

○ 면적 : 32,015㎡ (현장여건에 따라 조정가능)

2) 세부지침

○ 본 측량은 측량법 및 관련규정에 의거 감독원의 지시에 따라 시행한다.

○ 측량을 실시하기 이전에 측량에 관한 세부실시계획서를 작성하여 감독원과 협의 후 현지측량에 임하여야 한다.

○ 본 과업에 명시되지 않은 사항이라도 본 과업수행상 필요한 것은 감독원의 지시에 의거 수급자가 시행하여야 한다.

○ 현황측량은 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 각도는 도․분․초로 면적 및 길이는 미터법을 사용한다.

- 각 측량성과는 측량법에 의한 공공측량 작업규정이 규정하는 허용 범위내에 들어야 한다.

- 현황측량은 도근점에 의하여 실시하되 수시로 지적의 기지 점과 상이여부를 검토함은 물론 지상공작물 및 주요 지점을 표시하고 등고선은 최소 1미터 간격으로 표시하여야 한다.

- 주요 측량원점과 등고선에는 필히 지반고를 기입한다.

○ 삼각점 및 주요 수준점조서를 작성하고 감독원이 필요하다고 인정되는 지점에는 표석을 매설하여 영구 보존할 수 있도록 한다.

○ 삼각측량

- 국립지리원에 등록된 기지점(최소한 3점)을 기준하여 관측은 21초독 경위의 이상을 사용하되 측각은 2대회의 관측으로 초까지, 변장은 소수점이하 3위까지 산출하여야 한다.

○ 도근측량

- 도근점의 배치는 주로 현황시설물의 실측에 편리하도록 배치하고 관측은 삼각측량에 준하여 측각은 3배각으로 한다.

○ 등고선 측량

- 1미터 등고선 현황도는 실측하되, 표고는 수준점 및 보조 삼각점 표고에서 유도한다.

○ 수준측량

- 국립지리원에 등록된 기존성과를 확인하여 사용하고 지구 주위에 향후확인이 용이한 1개소 이상의 장소에 수준점을 표시하고 보조 삼각점에 대하여도 수준측량을 실시하여 그 기록이 영구 보존 되도록 하여야 한다.

○ 도면작성 및 계산

- 도면작성 : 수급인은 지형도상에 지적이 삽입된 종합도외에 지적도를 별도로 작성하여야 한다.

- 컴퓨터를 이용한 종합적인 분석 및 계획을 위해 지형이 입력된 CAD용 도면을 별도로 작성, 제출해야 한다.

- 각종 계산은 소정 양식에 의하여 실시하되 도상 지구계는 좌표로서 결정하여야 한다.

다. 성과품 작성

구 분	규격 및 형식	수 량	비 고
1. 지형 및 지적측량원도	관련 규정 따른 축적성과물	1부
2. 지장물 조사서 등	-	“	해당 시
3. 관련자료 USB 입력	CAD입력 도면	1개

4. 실시 설계

가. 일반사항

○ 실시설계는 국내 관계법령 및 시설기준에 적합하게 작성 하되, 대상지역의 입지적 특성을 충분히 고려하여 설계하여야 한다.

○ 모든 과업은 사업 책임기술자의 책임하에 해당 기술면허 소지자가 수행하여야 하며, 보고서 및 납품도서에는 책임기술자와 참여기술자의 담당업무와 기간을 수록하고 서명, 날인하여야 한다.

○ 공사비 산정은 국토교통부 제정 각종 표준시방서 및 관련시방서와 건설공사 표준품셈 및 정부노임단가를 기준으로 하되 최신 자료를 활용하고 그 출처를 기재하여야 하며, 단위는 미터법으로 한다.

○ 도시 숲 등 조성․관리 심의 등에 대비하여 수급인은 이에 만전을 기하여야 한다.

○ 조경수목은 최근의 공급수량, 수종, 생산지역 등 시장조사를 실시하고 수급 가능량을 정확히 예측하여 설계에 반영하며, 조경수 단가는 시장조사한 2개 업체 이상의 가격과 “한국농촌경제연구원 조경수 관측월보” 및 “서울특별시․한국토지주택공사 공동 적용 가격(2023년)을 비교하여 최저 가격을 적용한다.

○ 공사에 사용될 목재, 골재원, 기타 재료의 선정은 우리시와 사전 협의하여야 한다.

○ 계획수립 등의 자료를 기준으로 설계하되 우리시와 협의하여 시행한다.

○ 각 공종별 사용공법은 우리시와 충분히 협의를 거쳐 결정, 사용하여야 한다.

○ 부산광역시 건설공사 설계지침서 및 조경공사 설계지침서, 건설표준품셈 등 관련규정에 적합하게 설계하여야 한다.

나. 조경식재, 조경시설물설계

1) 일반지침

○ 본 과업은 인근지역의 주변여건과 장래 시설물의 이용계획을 충분히 검토하여 실시되어야 하며, 사후 유지관리 등 경제적인 설계가 되도록 구조, 자재 및 공법이 제시되어야 하고 내구성에 대한 안전성과 시공성이 고려되어야 한다.

○ 본 과업의 설계는 각 공종별 설계 기준서를 작성하고 설계기준은 관련 법령 등에 따라 우리시와 협의 시행한다.

○ 과업수행 내용 및 지침에 대하여는 수시로 우리시와 협의하여야 하며, 우리시의 요구가 있을 시 용역수행자는 이에 응하여야 한다.

○ 공사시에 투입되는 주요자재의 선택은 우리시와 사전 협의하여 결정하여야 하며 운반거리 등을 표시하여

제출한다.

2) 식재

가) 식재지반조성

○ 식재지반조성 설계는 대상지역의 토양조사결과를 기초로 한다.

○ 식재지반용 토양은 식물생육에 기본적으로 요구되는 이화학적 특성을 검사하고, 각 특성수준이 기준에 미달할 경우에는 이를 개량하거나  적합한 토양으로 교체하여 사용하여야 한다.

○ 표토의 상태, 지하 매설물․구조물의 위치 및 깊이, 기존식생의 상태  토양 오염상황 등의 조사결과를 반영하여 수목식재 시 생육지반 상세도를 작성한다.

○ 표토는 식재지반조성을 위한 가장 중요한 재료이다.  따라서 제반 건설공사에서는 토공 시행 전에 반드시 조경기술자 등 관련 전문가의 검토의견을 수렴하여 재활용을 위한 대책을 수립한다.

○ 식재지반은 저영향개발(LID)이 반영되도록 설계한다.

나) 식재일반

○ 기존계획, 현장여건을 고려하여 도심지 열섬완화, 미세먼지 저감 능력이 높은 수종 선정 및 배식계획을 수립한다. [산림청 미세먼지 저감 도시숲 조성관리 지침 참조]

○ 주위환경을 개선하고 인근 주민의 생활환경 및 주위환경과 조화를 이루도록 해야 하며, 외부 미관 및 풍치 등이 자연 특성과 균형이 되도록 고려하여 계획하여야 한다.

○ 자연환경 및 지형여건 등을 감안하여 식재식물의 종류, 수종을 선정하며, 유수지 또는 우수 조정지 우수저류로 인해 발생하는 침수에 안정적으로 활착․성장이 가능한 수종을 선정하고 이를 명확히 제시한다.

○ 대기 오염물질의 제거효과가 뛰어 나면서 경관이 수려한 수종을 선정한다.

○ 기존수목은 수목관리계획을 마련하여 최대한 반영할 수 있도록 존치, 이식(현장 내, 현장 외), 폐기로 구분하고, 공정을 고려하여 가식장소를 선정하도록 하며 그에 따른 가식장 운영 계획을 수립한다.

3) 시설물

가) 기본방향

○ 시설물은 적절한 유지관리 및 이용자의 안전성에 유의하여 설계한다.

○ 이용자 행태와 요구조건을 반영시켜 이용자의 편익을 도모하고 휴게공간은 그늘을 만들 수 있도록 구조물을 포함하여 설계한다.

○ 시설물은 자연재료를 사용하여 친숙한 환경을 조성하고, 각각의 요소가 갖는 고유한 특성을 유지하되 기존 주변 환경에 조화되도록 형태, 색상, 질감 등을 고려하여 전체적인 통일감을 유지하도록 설계한다.

○ 경제성, 내구성, 안전성을 고려한 재료로 설계하고 특히 보도는 투수성 또는 반투수성 재료를 사용한다.

○ 시설은“장애인․노인․임산부등의 편의증진보장에 관한 법률”에 의한 편의시설 설치 목적에 의하도록 하여 장애인 등의 보행성과 접근성을 향상시켜야 한다.

○ 경제적 설계방안 및 사후관리상의 문제를 고려하여 설계한다.

○ 진입로 및 주차장은 이용자수를 고려하여 설계한다.(필요시)

나) 휴게시설

○ 이용자에게 불편이 없도록 이용행태, 동선, 이동거리 등을 고려하여 규모 및 위치를 계획한다.

○ 파고라, 벤치 등은 점경물로서 공간구성 요소로서의 성격을 지니기 때문에 주변시설이나 식재 등과의 연관을 고려하여 배치한다.

○ 휴게시설은 그 이용권, 즉 거리를 고려하고, 자체의 공간기능과 전망 등을 감안하여 배치한다.

○ 휴게시설은 공원 및 시설물에 어울리고 통일성 있는 소재를 선정하도록 한다.

○ 벤치나 앉음벽 등 휴게시설을 설치하는 곳은 해당지역의 여건을 감안하여 휴게시설의 남측 일정거리에 그늘목(낙엽교목류)을 식재하여 여름철 휴게시설에 그늘을 제공할 수 있도록 설계한다.

○ 벤치나 정자 등 휴게시설을 설치하는 장소는, 주민들의 주거지역(주택)과 일정한 이격거리를 두어 해당 휴게시설 이용자들의 소음이나 이용행태(특히 야간 풍기 물란 행위) 등으로 인한 주민들의 민원이 발생하지 않도록 설계한다.

다) 편익시설

○ 편익시설의 위치 결정시 이용자 동선, 타 시설과의 상호 위치관계 주변의 경관, 이용자의 편익성, 자연조건, 시설의 안전성, 설비 조건 등을 고려한다.

○ 규모 결정시는 이용자의 편익성, 관리운영방법, 재료의 안전성  등을 고려한다.

○ 특히 음수대는 이용자 동선, 행태를 고려한 위치 지정 및 편의성과 관리적 측면을 고려한 디자인을 선택하여야 한다.

라) 안내표지시설

○ 각종 시설안내판의 디자인은 시각장애인을 위한 점자안내시설을 입구부 및 주요부에 병행 설치하도록 한다.

○ 기능별로 규격을 차별화하고 설치대상의 입지조건에 따라 규격 및 배치 등을 설정한다.

○ 각 안내표지시설에 표시하고자 하는 구체적인 정보(위치도, 설명 등)가 표현되도록 하여야 한다.

다. 토목설계

1) 일반지침

○ 대상지 주변 측량표(국가기준점)에 대한 현황조사와 기존구조물, 시설 등에 대한 조사를 실시한 후 설계에 검토․반영하여야 한다.

○ 추가로 시험을 요하는 주요 사항이 있을 경우에는 우리시의 승인을 받아 실시하여야 한다.

2) 부지 정지설계

○ 부지 조성은 현 지형에서 토량의 이동이 최소가 되도록 하며, 부득이 토공균형이 이루어지지 않을 경우에는 토취장 또는 사토장을 조사하여 선정, 제시하여야 하며, 이러한 경우 토취장 또는 사토장을 개발하기 위한 구체적 계획을 수립하여야 한다.

○ 계획고는 도로, 배수, 침수피해방지 등을 고려하여 합리적으로 계획하여야 한다.

○ 정지계획 수립 시 용도계획을 고려하여 자연환경을 최대한 이용하도록 하고, 성토 등이 필요할 시 양질토사를 활용하는 방안이 강구되어야 한다.

○ 연약지반 발생지에는 이에 대한 처리방안과 절․성토 사면의 안정적 보호대책을 각각 비교 검토하여 그 대책을 수립하여야 한다.

○ 비탈면은 비탈면안정과 토지이용도 및 배수처리 등을 감안하여 설계하여야 한다.

3) 상수도 설계

○ 기존 상수체계와 배수지 등을 검토하여 급수계획을 수립하고, 시설별․공간별 급수량 등을 추정하여 우리시와 협의한 후 설계한다.

○ 상수도간선 및 지선 분기가 필요한 경우 우리시와 협의후 이에 대한 관련법규 검토 및 계획을 수립하여 제출하여야 한다.

○ 관경은 일부 관로의 사고 발생시 타 관로를 최대한 이용할 수 있도록 고려하여야 하며, 관매설의 깊이는 동결심도 및 기타 매설물을 고려하여 설계하여야 한다.

8) 부대공사 등 설계

○ 석축, 옹벽, 암거 울타리 등 기타 부대공사는 구조검토서 및 설계도면을 작성하고 안전도와 내구성․경제성 등을 검토하여 설계하여야 한다.

라. 전기설계

1) 기본원칙

전기시설은 공간의 기능을 충족할 수 있는  설비로서 아래 사항에 적합하게 시설한다.

가) 각 설비별 에너지절감대책 및 안전․신뢰성이 높은 설비로 구성

나) 전기분야 기구 등의 선정 및 디자인 계획 등을 조경설계와 부합

다) 기타 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 발주기관의 감독자 지시에 따를 것

라) 공사시방서 및 설계도면 작성시 우리시 도로 기전설비설치 및 관리에 관한 규정 및 부산시 전문시방서(건축전기설비, 건축정보통신설비편)를 반영 할 것

마) 야간시설 이용객의 증가를 고려한 야간조명시설 및 방범계획을 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

바) 등기구는 과업의 기본방향에서 제시된 주변 수목 및 분위기에 맞는 광원과 등기구가 선정될 수 있도록 할 것.

사) 야간조명시설 계획 시 관계 기관이 인정하는 기준에 만족해야 한다.

아) 등기구는 주변의 수목배치 등을 감안하여 적절한 위치에 설치하도록 하고 이용자들이 눈부심(Glare) 등으로 피로‧불쾌감을 갖지 않도록 적절한 높이 및 배광을 검토할 것.

자) 신재생에너지를 활용하여 친환경 및 에너지 절약 방안을 제시한다.

2) 설계

가) 착수계 제출시 해당 설계공정에 대한 설계공정예정표를 우리시에 제출, 승인을 받아야 하며 예정공정을 준수하여야 한다.

나) 모든 조명 관련 설비는 고조도의 일변도를 지양하고 합리적이며 고효율 저에너지 소비의 조명설계가 되도록 하며, 조도기준은 한국공업표준규격(KSA-3011)에 따르되 "산업안전법" 및 "환경관리기준" 에 의한다.

다) 조명설비는 기존 조명설비와 조화되는 시설과 조명효과가 가장 좋은 방법을 선택하여 설계하여야 하며, 조명기구는 설치되는 장소의 특성에 맞게 선정되어야 한다.

라) 옥외등 설비는 시설물 유지관리 및 야간범죄의 예방 등이 용이하도록 배치하여야 하며, 등기구는 외관이 아름답고, 순간 최대풍속 40m/s의 강풍 등에 견딜 수 있으며, 소비전력이 적은 것으로 선정하여 설계하여야 한다.

마) 모든 설비는 경제성을 고려하여 에너지 효율을 극대화하고, 투자비를 절감 할 수 있어야 한다.

마. 설계도서 작성에 대한 지침

1) 설계도서 작성

가) 시방서의 작성

○ 부지 조성공사와 이에 부대되는 전공사의 품질, 공사의 안전관리를 위한 공사설명서, 일반시방서, 특기시방서를 감독원과 협의 작성한다.

나) 설계도면의 작성

○ 모든 설계도서는 가급적 컴퓨터 작업에 의한 성과로 작성하도록 하며 설계도면의 규격, 양식 등의 작성은 감독청이 지정하는 규격으로 한다.

○ 도면상의 기호로 설명하기 곤란한 부분은 문자로 설명한다.

○ 종단 작성 시 필요한 경우 종단 평면도를 함께 작성한다.

○ 설계도에 각종 재료표시 및 치수표시는 미터법에 의해 작성한다.

○ 설계도서는 공종별로 개별 작성한다.

○ 설계 준공 후 시공과정에서 설계변경, 에스컬레이션 등의 부수적 업무에 편리하도록 도서를 작성한다.

다) 사용자재 및 시설물조서

○ 사용자재중 철근, 시멘트, 상하수도용 자재등 주요자재는 표시품을 사용하고 표시품이 없을 때는 감독원의 별도지시에 따라 설계한다. 또한 지역경제 활성화를 위하여 부산지역(본사) 업체 생산 자재, 시설물을 우선 반영하고 반영결과를 추후 보고하도록 설계서에 명시한다.

라) 공사 공정계획

○ 공정계획은 단계별, 공종별로 PERT CPM 방식에 의한 공정표를 작성하여야 한다.

마) 동원인원 계획표 및 장비투입 계획서

○ 공종별 동원인원 및 장비투입계획을 월별로 작성하여야 한다.

바) 단가 정의

○ 물공량 명세에 따른 순서에 의거 공종별 단가를 산출할 수 있도록 단가정의를 작성하여야 한다.

사) 내역서 작성

○ 수량 및 단가산출

- 수량산출서 및 단가산출서는 각각 작성하되 공종별 재료별로 산출하여 편집하기 편리하도록 작성하고 공종별 단가는 일위대가표 및 단가산출서 상에 명기하여야  한다.

○ 적용품셈 및 요율

- 국토교통부 제정 표준품셈(실시설계가 진행되는 시점의 발행년도)에 의거 산정하되 감독원과 협의 후 적용한다.

- 노임은 당해년도 시중노임 공시 단가를 기준으로 작성하되 사전에 감독원과 협의하여 결정한다.

- 자재의 가격은 조달청 발행 가격정보를 기준으로 하고 동 책자에 수록되지 않은 단가는 정부승인 기관에서 발행되는 물가자료, 물가정보, 거래가격, 견적서 등 적용한다.

- 조경수 단가는 시장조사한 2개 업체 이상의 가격과 “한국농촌경제연구원 조경수 관측월보” 및 “서울특별시․한국토지주택공사 공동 적용 가격(2023년)을 비교하여 최저 가격을 적용한다.

- 공사원가계산서 작성은 지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령 등 관련 규정에 따른다.

- 산재보험 요율은 고용노동부제정 보험요율에 따르며 안전관리비는 고용노동부 고시에 의한 건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준에 따른다.

- 기타 사항은 감독원과 별도 협의하여 결정하고 지시에 따른다.

2) 성과품 작성

구 분	규 격 및 양 식	수 량	비 고
1. 실시설계도서	∙ 설계도면(A3) ∙ 설계서(A4)-설명서, 내역서, 시방서, 산출서 등	각 5부
2. 실시계획인가신청서	∙ 인가에 필요한 제반서류	1 식
3. 관련자료 USB 입력	∙ 도면, 사진, 보고서 등	1개